문서번호	배수과-5257
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장		급수부장
박종혁	이임섭		08/08 代박기범
협 조

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 7월 실적 보고

2014. 8. 8(금)   .

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『직결급수 전환 불가주택』

소형물탱크 철거 및 직결급수 전환 7월 실적 보고

『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』사업관련 직결급수 전환이 곤란한 주택의 7월까지 추진 실적을 보고 드림.

□ 사업개요

○ 사업대상 : 2,069개소

○ 사업기간 : ’14년 1월 ~ ’14년 12월

○ 사 업 비 : 12억원

□ 직결급수 전환 추진실적(불가 주택 포함)

(단위:개소)

구 분				계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
물탱크 철거 및 직결 급수 전환	2014년	계획		2,069	118	119	79	57	268	708	534	186
		1월 ~ 7월	목표	1,315	76	75	55	36	169	442	345	117
			실적	1,668	78	85	63	80	364	484	365	149
			달성율 (%)	126.8	102.6	113.3	114.5	222.2	215.4	109.5	105.8	127.4
	7월	목표		264	15	15	11	7	33	88	69	23
		실적		494	10	18	10	47	193	135	73	8
		달성율 (%)		187.1	66.7	120.0	90.9	671.4	567.6	151.7	105.8	33.3

○ 불가사유별 추진실적

(단위:개소)

사업소	구분	계	수압부족	관노후	관경협소	수요가 반대	비고
계	2014년 계획	2,069	102	229	287	1,451
	실적 (7.31)	1,668	44	144	146	1,334
	달성율 (%)	80.6	43.1	62.9	50.9	91.9
중부	계획	118	1	12	3	102
	실적	78	-	5	3	70
서부	계획	119	3	3	6	107
	실적	85	-	-	1	84
동부	계획	79	-	-	-	79
	실적	63	-	-	-	63
북부	계획	57	8	7	7	35
	실적	80	8	11	8	53
강서	계획	268	3	7	9	249
	실적	364	-	7	11	346
남부	계획	708	21	187	256	244
	실적	484	4	117	119	244
강남	계획	534	45	3	2	484
	실적	365	14	3	2	346
강동	계획	186	21	10	4	151
	실적	149	18	1	2	128

□ 향후계획

○ 2014년 7월까지 직결급수 추진목표 달성율은 126.8%(목표 1,315개소, 실적 1,668개소)이나,

○ 직결급수 전환이 곤란한 주택은 수압부족 43.1%, 관노후 62.9%, 관경협소 50.9% 등과 같이 부진하므로 이에 대해 각 수도사업소에 해결방안을 마련, 적극 시행토록 하여 사업 추진에 만전을 기하고자 함.  끝.