문서번호	정보시스템담당관-9621
결재일자	2014.8.8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

				시 민
주무관	정보자원관리팀장	정보시스템담당관		정보기획단장
김대원	고보영	김기병		08/08 김경서
협 조
	주무관		양동섭

시도 행정정보화사업 추진 계획

2014. 8.

정 보 기 획 단

(정보시스템담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

- 시도행정정보시스템의 안정적 운영을 위한 -

시도 행정정보화사업 추진 계획

한국지역정보개발원 업무위탁을 통하여 시도행정 및 재해복구시스템을 안정적으로 운영하고, 시도행정정보시스템 노후장비 교체 및 보강을 통하여 장애 발생을 미연에 방지하고 원활한 서비스를 제공하고자 함.

Ⅰ		추 진 근 거

전자정부법 제72조 「한국지역정보개발원의 설립」및  동법 시행령 제87조「한국지역정보개발원의 정보화 추진 및 지원」

안전행정부「지방행정공통정보시스템 종합장애 대응체계 구축」사업

안전행정부「시도·새올 공통기반 노후장비 교체 및 정보보안강화」사업

2015년도 백오피스 내용연수 초과장비 교체예산 반영 협조 요청(‘14.07.02., 정보자원운영과-1398호)

Ⅱ		추 진 현 황

‘05. 2. ~ ’09.12.	: 시도행정정보시스템 인프라 구축

‘12. 8. ~ 12.	: 시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 구축

‘12.12. ~ ’14. 5.	: 시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 구축 리스료 지급 (7회/총20회)

‘14. 1. ~ 12.	: 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리 위탁(한국지역정보개발원)

‘14. 1. ~ 12.	: 시도 및 시군구 재해복구시스템 통합 유지보수 및 운영 위탁 (한국지역정보개발원)

Ⅲ		사 업 개 요

시도행정, 시도 및 시군구 재해복구시스템 유지보수

❍ 사업기간 : ‘15. 1. ~ 12.

❍ 사업예산 : 169,046천원

❍ 사업내용

- 시도행정정보시스템 전산장비 유지관리

- 시도 및 시군구 재해복구시스템 통합 유지보수 및 운영

❍ 사업방식 : 한국지역정보개발원과 위·수탁 협약을 통해 유지보수 업무 수행

시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 구축 리스료 지급

❍ 리스기간 : ‘12. 12. ~ ’17. 9. (총20회)

❍ 총리스료 : 2,499,254천원

❍ 소요예산 : 486,475천원 (국비 113,869천원, 구비 218,675천원 포함)

※ 실소요예산(시비) : 153,931천원

❍ 계약자(리스사업자) : NH농협캐피탈(주)

❍ 지급방법 : 년 4회, 3개월(선불) 단위 이뱅킹을 통한 이체

시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 및 정보보안 강화사업 리스료 지급

❍ 리스기간 : ’14. 12. ~ ‘19. 9.

❍ 총 리스료 : 미 정

❍ 소요예산(안) : *************************

※ ‘14년 소요예산 : 21,593천원 (국비 20,552천원 포함)

❍ 계약자(리스사업자) : 미 정

❍ 지급방법 : 년 4회, 3개월(선불) 단위 이뱅킹을 통한 이체

※ ‘14. 8월 현재 한국지역정보개발원 위·수탁하여 수행 사업자 및 리스사업자 선정 진행 중이며 ’14.10월 이후 소요예산 확정

노후장비 교체 및 보강

❍ 사업기간 : ‘15. 3. ~ 9.

❍ 사업예산 : *********

❍ 사업내용

***************************

**************************************************

**********************************

******************

*************************************************

************************************************

Ⅳ		소 요 예 산

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계			595,188 (x113,869)	655,995 (x113,869)	1,078,639 (x141,577)	422,644 (x27,708)
	공기관등에대한대행사업비		108,713	169,520	169,046	△474
		시도행정정보시스템 전산장비 유지관리	40,033	40,093	40,093	-
		시도 및 시군구 재해복구시스템 통합 유지보수 및 운영	68,680	129,427	128,953	△474
	자산및물품취득비		486,475 (x113,869)	486,475 (x113,869)	909,593 (x141,577)	423,118 (x27,708)
		시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 구축 리스료 지급	486,475 (x113,869)	486,475 (x113,869)	486,475 (x113,869)	-
		시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 및 정보보안강화사업 리스료 지급	-	-	30,498 (x27,708)	30,498 (x27,708)
		시도행정정보시스템 스토리지 구매	-	-	274,890	274,890
		시도행정정보시스템 웹서버 SW 구매 및 AP, DB 서버 보강	-	-	117,730	117,730

※ 상세 산출내역은 [붙임 1] 참고

Ⅴ		기 대 효 과

한국지역정보개발원 업무위탁을 통하여 시도행정정보시스템, 시도 및 시군구 재해복구시스템의 안정적 운영 및 유지관리

자치구의 재난, 재해, 장시간 시스템 장애 등으로부터 민원 행정업무의 연속성을 확보하여 중단 없는 행정서비스 구현

노후화된 장비를 교체를 통해 안정적인 시스템 운영 기반을 마련하고, 시도행정정보시스템 내 개인정보에 대한 보안 강화

Ⅵ		추 진 일 정

시도행정, 시도 및 시군구 재해복구시스템 유지보수

❍ 한국지역정보개발원과 위·수탁 협약 체결	: ‘14. 11.

❍ 한국지역정보개발원에 위·수탁 비용 납부	: ‘15. 1.

❍ 한국지역정보개발원 유지보수 업무 수행	: ‘15. 1. ~ 12.

시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템 구축 리스료 지급

❍ ‘15년도 리스료 지급 (10~13회분, 총20회)	: ‘15. 1. ~ 12.

시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 및 정보보안 강화사업 리스료 지급

❍ 한국지역정보개발원과 위·수탁 협약 체결	: ‘14. 8.

❍ 서울시 장비 도입 및 설치                         : ‘14. 8. ~ 11.

❍ 사업비 집행 및 사업완료                          : ‘14. 12.

❍ ‘15년도 리스료 지급	: ‘15. 1. ~ 12.

노후장비 교체 및 보강

❍ 노후장비 교체 및 보강 사업 계획 수립	: ‘15. 3

❍ 발주 및 공고	: ‘15. 4.

❍ 사업자 선정 및 계약 체결	: ‘15. 5.

❍ 노후장비 교체 및 보강 사업 수행	: ‘15. 5. ~ 9.

붙임 : 1. 산출내역서 1부.

2. 정보시스템담당관 노후장비 교체 계획 (‘15~’17) 1부.

3. 노후장비 교체 및 보강 시스템 구성도 1부.  끝.

[ 붙임 1 ] 산출내역서

￭ 공기업등에 대한 대행사업비 : 169,046천원

(단위 : 천원)
구 분		산 출 기 초	산출금액	비고
공기업등에 대한 대행사업비	시도행정정보시스템 전산장비 유지관리	대상 : S/W(8종) - LDAP, SSO, 리포팅툴, iPlanet(웹서버), WAS, EAI, RM, 문자음성변환 예산 - S/W : 도입가의 7%	40,093
	시도 및 시군구 재해복구시스템 통합 유지보수 및 운영	시도 재해복구시스템	128,953
		대상 : H/W(4종), S/W(11종), - H/W : 웹서버, DR서버, 스토리지, SAN - S/W : 웹서비스 솔루션, WAS, EAI, SSO, DBMS, RM, 리포팅툴, LDAP, SMS Agent, 서버보안툴 2종 예산 - H/W : 도입가의 7% - S/W : 도입가의 5%
		시군구 재해복구시스템
		대상 : H/W(8종), S/W(16종) - H/W : AP, DB, AP/DB, 웹서버, 스토리지 그룹1~7, FCIP, SAN, L2 - S/W : SSO, DBMS, 미들웨어(Entera), 웹서버(WebTier), WAS(WebLogic), 모바일 플랫폼 SW, 어플리케이션 통합소프트웨어, 웹UI, 리포팅툴, 웹CAD뷰어, Web Disk. SMS/E-Mail, 분배SW, SMS Agent, 음성변환솔루션, 서버보안툴 예산 - H/W : 도입가의 7% - S/W : 도입가의 5%
총계(부가가치세 포함)			169,046

￭ 자산및물품취득비 : 909,593천원 (국비 141,577천원)

· 시도행정 서버교체 및 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 구축 리스료 지급

- 121,618,630원 × 4회 = 486,474,520원

· 시군구 재해복구시스템(시 설치분) 서버 증설 및 정보보안 강화사업 리스료 지급

-   7,624,500원 × 4회 =  30,498,000원

· 노후장비교체 및 보강

(단위 : 천원)
구 분		규격	수량	단위	산출조사근거			산출금액		비고
					A사	B사	C사	단가	금액
노후 장비 교체 및 보강	스토리지 구매	Hitachi HUS VM - 용량 Physical 14.4TB	1	식	274,890	280,500	283,800	274,890	274,890
	AP, DB서버 보강	IBM p780 하드웨어 증설 - I/O Drawer 증설 - 8Gb Dual-x4 SAS Adapter 추가 - SAS DISK 300GB 4Ea 추가 - 8Gb Dual Port FC Card 추가	2	식	33,331	42,421	37,876	33,331	66,662
	SSO 서버이관	서비스 이전 및 기술지원	1	식	5,000	71,000	80,000	5,000	5,000
	LDAP서버이관	서비스 이전 및 기술지원	1	식	8,250	16,500	19,800	8,250	8,250
	웹서버 SW 구매 및 이관	Oracle WebTier - Enterprise Edition - 6 Processor License 기술지원 - On-Site Support	1	식	39,600	37,818	41,800	37,818	37,818
	소계(부가가치세 포함)								392,620
총계(부가가치세 포함)									392,620

[ 붙임 2 ] 정보시스템담당관 노후장비 교체 계획

					(단위 : 천원)
연번	사 업 명	‘15년예산	‘16년예산	‘17년예산	‘15년 교체 내용
	계	392,620	464,768	250,000
1	시도행정정보시스템 노후장비 교체 및 보강	392,620	-	-	○ 스토리지 구매 - 274,890천원 ○ 웹서버 S/W 구매 및 SSO/LDAP 서버 이관 - 117,730천원
2	인터넷 민원신청 및 통합 발급시스템 노후서버 교체		179,143	-
3	행정포털 운영 및 유지보수		285,625	250,000