문서번호	방재시설부-7505
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		서관석	08/11 임춘근
협조

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

2014. 8

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 목4동 배수관로 설치공사

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 물가 변동으로 인한 게약금액조정에 따른 서울시시설관리공단으로부터 현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m,

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 서울시시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

관련근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조(물가변동 등에 따른

계약금액 조정) 및 동법시행령 제73조, 동법시행규칙 제72조

❍ 공사계약일반조건(기획재정부 회계예규)

실정보고 및 감리검토내용

❍ 검토내용

1) 물가변동으로 인한 계약금액 적정여부

구 분	기 준	청 구 내 용	적정여부
청구요건	- 도급사의 청구	-도급사 공문접수 승영(공릉)2014-30(2014.6.18.), 승영(공릉)2014-35(2014.7.25.)	적정
기간요건	계약일로부터 90일경과	-입찰기준일 : 2012.12.17. -계약체결일 : 2012.12.31. -조정기준일 : 2014.1.1	적정
등락요건	조정율 3%이상	-물가변동 조정율 3.02%	적정

2) 물가변동 조정방법 : 지수변동율(도급계약서 명시)

3) 물가변동 조정내용

구 분	금 액	비 고
①기준시점(입찰일)	2012.12.17
②비교시점(조정기준일)	2014.1.1
③도급 계약금액	5,230,720,000원
④물가변동 제회금액	395,539,000원
⑤물가변동 적용금액	4,835,181,000원	③-④
⑥물가변동 조정금액	146,022,000원	지수조정율 3.02%
⑦선급금 공제액	0원
⑧인상(예정)조정금액	146,022,000원

4) 물가변동으로 인한 공사비 변경내용

구분	당초	물가변동조정 (예정)금액	변경	증,감
공급 가액	4,877,880,000원(총차) 1,588,254,545원(2차)	132,747,273원(총차) 43,221,818원(2차)	5,010,627,273원(총차) 1,631,476,363원(2차)	132,747,273원(총차) 43,221,818원(2차)
부가세	487,788,000원(총차) 158,825,455원(2차)	13,274,727원(총차) 4,322,182원(2차)	501,062,727원(총차) 163,147,637원(2차)	13,274,727원(총차) 4,322,182원(2차)
도급비	5,365,668,000원(총차) 1,747,080,000원(2차)	146,022,000원(총차) 47,544,000원(2차)	5,511,690,000원(총차) 1,794,624,000원(2차)	146,022,000원(총차) 47,544,000원(2차)

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 물가변동으로 인한 계약금액 조정검토 결과 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부. 끝.