의원 요구 자료 제출

시 행	도로계획과-10267
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		민자사업팀장	도로계획과장	시설안전정책관	도시안전실장	결재
박상위		정회원	형태경	한제현	08/11 조성일
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 128번, 조상호 의원, 도시안전건설위원회)

따로붙임 : 조상호 시의원 요구자료 1부.  끝.

조상호 의원(도시안전건설위원회, 새정치민주연합)

요구번호 : 128번

3. 은평새길에 대한 민자사업 제안부터 현재까지 추진된 세부내용 및
향후계획 (예산, 민원, 위치도 등 포함 상세히)

□  의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

○ 사업개요

- 사업위치 : 은평구 불광동(통일로) ~ 종로구 부암동(자하문길)

- 사업규모 : 4차로, 5.76km

- 사업기간 : 2009 ~ 2019

- 총사업비 : 3,012억원

※ 재정지원 : 1,182억원 (서울시 682억원 / LH공사 500억원)

- 예산현황 : ‘14년 200억원(보상비, LH 교통사업개선분담금)

○ 추진현황

- '06.11.06 : 서북부지역 교통개선대책

- '07.07.02 : 삼송·지축·향동지구 광역교통개선대책(국토교통부)

- '07.07.19 : 서북부지역 간선도로망 확충계획

- '07.07.27 : 민간제안서 제출(GS건설 등 7개사)

- '08.07.04 : 사업제안서 타당성조사 완료(KDI 공공투자관리센터)

- '08.11.28 : 기획재정부 민간투자사업심의위원회 심의(결과 : 원안통과)

- '08.12.19 : 시의회 동의(결과 : 원안가결)

- '09.01.07 : 제3자 제안공고

- '09.05.26 : 우선협상대상자 선정

- '11.03.31 : 은평새길 전면지하화 진정서 제출(은평뉴타운 주민)

- '11.06.29 : 은평새길 조기건설 촉구 결의한 송부(은평구의회)

- '11.09.05 : 주민설명회 개최

- '11.10.27 : 전문가 토론회 개최(환경․교통 전문가 및 환경․시민단체, 주민대표 등)

- '11.11.30 : 은평새길 노선변경 및 전면지하화 진정서 제출

- '12.11.04 : 은평뉴타운 현장시장실 서북부지역 교통개선대책 숙의

- '13.06.27 : 은평뉴타운 현장시장실 후속 거버넌스 설명회 개최

- '13.07.24 : 서울시 도시철도 종합발전방안 발표(도시교통본부)

□신분당선 연장은 국토교통부에 광역철도로 추진해줄 것을 건의

- '13.12.09 : 신분당선 연장 등 국토교통부 공식 건의(도시교통본부)

- '14.01.18 : 은평뉴타운 시장과의 민원데이트(1차)

- '14.03.31 : 은평새길 현안사항 검토회의

- '14.04.07 : 은평새길 현안 검토보고(시장)

- '14.05.13 : 은평새길 추진계획 검토보고(행정2부시장)

□은평뉴타운, 불광동, 종로구 민원해소 대책 수립

- '14.06.18 : 은평뉴타운 시장과의 민원데이트(2차)

- '14.08.현재 : 기본설계 및 교통분석 보완 중

□ 향후일정

- '14.하반기 : 설계VE, 민자적격성 재검증 및 실무협상

- '15.상반기 : 실시협약 체결 및 민투심의 등 관련 절차 진행

- '15.하반기 : 실시계획 승인 및 보상 등 사업 착수(공사기간 48개월)

따로붙임 : 은평새길 민간투자사업 위치도 1부. 끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (도로계획과)	담당사무관	정회원
	☎ 2133-8072	주무관	박상위
	작 성 일 : 2014.8