함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	「강북취수장 배전반 제작구매 설치」납품기한 연기 요청

1. 원수관리과-1461(2014.8.8.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 수행중인「강북취수장 배전반 제작구매 설치」와 관련하여 다음과 같이 납품기한을 연기하고자 요청합니다.

가. 계약현황

- 사 업 명 : 강북취수장 배전반 제작구매 설치

- 계약기간 : 2014. 5.22~9.19

- 계약금액 : 50,498,000원

- 계약업체 : ㈜일산전기

나. 납품기간연기

당 초	변 경	비 고
2014. 5.22~9.19	2014. 5.22~11.11

다. 연기사유

- 병행공정인「강북아리수정수센터 강북계열 취수펌프 제작설치」와 납품기한 불일치에 따라 연기 필요

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 1. 합의각서 1부.

2. 납품기한 연기 검토서 1부. 끝.

	원수관리과장
주무관	김향석		원수관리과장	08/11 손주옥
협조자
시행	원수관리과-1465	(		)	접수		(		)
우	472-908	경기 남양주시 와부읍 도곡리 1124번지 (경강로682)	/
전화	02-3146-5226	/전송	02-3146-2238	/	greensee@seoul.go.kr	/	대시민공개