문서번호	급수운영과-17935
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이철		김기상	전결 08/11 장시명
협조

용역 실정 검토 보고

(2014 관악 금천구 관내 상수도공사 건설폐기물 처리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

용역 실정 검토 보고

(2014 관악 금천구 관내 상수도(송배수관정비,시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리용역)

명에 의거  「2014 관악 금천구 관내 상수도(송배수관정비,시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리용역」수행 중 서울특별시 시설관리공단으로부터 아래와 같은 용역 실정보고 사항이 접수되어 검토 후 보고 드림

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 2014 관악 금천구 관내 상수도(송배수관정비,시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역개요 : 폐아스콘 1,755㎥,폐콘크리트 989㎥, 폐토사 37㎥, 폐보호통2㎥

○ 도 급 액 : 금85,693,000원

○ 용역기간 : 2014. 7.24. ~ 2015.07.30.

○ 도 급 자 : 우광개발(주)  대표 임태권

Ⅱ		실정보고 내용

○ 관련근거 : 공사관리2처-12888(2014.08.07)

○ 현황 및 문제점

- 폐아스콘 처리비가 설계에는 무대(0원)로 반영되어 있고, 폐기물처리업체에서 폐아스콘은 재활용을 위해 이물질이 없는 순수한 폐아스콘만 반입을 허용되고 있음.

- 현장에서 발생한 폐기물은 성상별로 분리 반출하여야 하나, 일부 현장여건상 성상 분리가 어려워 건설폐재료(폐아스팔트콘크리트+폐콘크리트 혼합)로 처리해야 하는 실정임.

※ 건설폐재료 : 가연성폐기물이 제거된 상태로서 폐콘크리트, 폐아스콘이 일부 포함 되어 있고, 폐벽돌, 폐기와, 폐토사등 재활용이 가능한 비금속광물질이 혼합 배출된 상태.

○ 검토(안)

구 분	1안	2안	3안	비고
내 용	현장에서 발생된 폐기물은 깨끗한 성상으로 분리	건설폐재료보다 저렴한 폐콘크리트 계약 단가 적용	물가정보에 있는 건설폐재료 단가 적용
건설폐재료비 적용단가	성상별로 처리	13,950원	24,336원 (낙찰률 적용)
감독의견		적 용

○ 검토의견

- 건설폐재료 처리 비교안을 위와같이 검토 결과 현실적으로 성상분리가 아려운 일부 현장에 대해 제2안과 같이 건설폐기물처리비를 폐콘크리트처리비로 적용하는 것이 타당.

· 건설폐재료(폐아스팥트+폐콘크리트 혼합)→ 폐콘크리트처리비 적용

- 폐아스콘 성상분리 불가 현장

· 소규모 시설물공사

· 관로공사(CA도로) 구간 등

►(참고) 폐기물처리비 단가현황

성 상	단 위	폐기물처리비 계약단가 현황	물가정보 조사 (2014.1월)	비고
폐아스콘	TON	무 대	-
폐콘크리트	TON	13,950원	-
건설폐재료	TON	없음	27,731원

Ⅲ		검토의견

○ 상수도 공사(시설물 공사 등)시 현장 도로 현황이 CA도로의 경우는 성상별 분리배출이 어려움.

- 분리배출이 어려운 공사장 : CA도로(관로 및 소규모 공사장 포함)

○ 분리배출이 어려운 건설폐재료 처리 검토

구 분	감독 의견	사업소 검토	비고
제1안	현장에서 발생된 폐기물은 깨끗한 성상으로 분리	CA도로 경우 각 성상별로 분리가 어려워 처리가 매우 어려운 실정
제2안	건설폐재료보다 저렴한 폐콘크리트 계약단가 (13,950원) 적용	건설폐재료 처리비보다 저렴하며 적정함	적용
제3안	물가정보에 있는 건설폐재료 단가 적용: 24,336원(낙찰률 적용)	폐재료로 처리시 과도한 예산증액 발생

○ 분리배출이 어려운 건설폐재료(폐아스팥트+폐콘크리트 혼합)는 계약단가가 없는 바, 물가정보 등 타 자료 검토하여 산출되어야 하나, 이의 처리비용이 폐콘크리트 처리비와 비교시 현저하게 과다한 비용이 발생됨

○  상기와 같이 감독부서 검토의견과 같이 건설폐재료 물량은 폐콘크리트처리비를 적용하여 정산 반영함이 타당할 것으로 판단되며, 아울러 철저한 현장관리로 정산 시 관련보고서 및 근거자료를 확보 제출토록 조치코자함

- 근거서류 확보 제출(발생현황 사진, 건설폐재료사진, 관련보고서 사본 등)

- 폐아스콘은 한밭산업(주)으로, 폐콘크리트는 우광개발(주)로 성상분리 배출

- 발생현장에서 최종처리단계까지 입회 점검 및 확인 철저 시행

붙 임 : 시설관리공단 실정보고 문서 각 1부.  끝.