문서번호	도시철도설비부-7411
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		이용기	08/11 정찬웅
협 조

『9호선 연장건설(2단계)』정보통신분야 공정회의(15차) 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08.

9호선연장건설 정보통신분야 공정회의(15차) 결과보고

9호선 연장건설 정보통신분야  현장시공 및  시스템에 대한  공정추진 현황과 현안사항에 대하여 공정회의를 개최하고  보고드림

‘’

						회의 개요

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 08. 07(목)  14:00 ~ 15:00

○ 장  소 : 시스템분야 감리단 상황실

○ 안  건

- 추진공정현황 및 추진계획

- 시스템별 현안사항

○ 참석자 : 19명

- 본부(4명), 시스템 감리단(2명), 시공사(1명), 현대정보기술(주), LGCNS,시스템 공급업체(12명)

□ 계약현황

구 분		계약업체/관련업체		대표자	계약일자	착수일자	준공(납품)일
정보통신설비공사		대선이엔씨(주)		최승재	‘12.12.26	‘13.01.15
관급장비	1) 주전송설비	현대정보기술(주)	(주)아큐픽스	마용득	‘13.03.20	‘13.04.02	‘16.04.30
	2) 열차무선설비		㈜리노스
	3) 종합무선중계설비		아함전자(주)
	4) 교환및관제전화설비		(주)코바다
	5) 정거장영상설비		송림기술(주)
	6) 대열차공간화상설비		한국후지쯔(주)
	7) 행선안내게시기설비		(주)아트웨어
	8) 종합집중관리설비		(주)코바다
	9) 경영정보시스템		(주)에이티에스아이테크
	10) 자동요금징수설비	㈜LG CNS		김대훈	‘13.06.20	‘13.07.09	‘16.04.30
	11) 자동방송설비	(주)디라직		박성기	‘13.04.15	‘13.05.23	‘16.04.30
	12) 무정전전원장치(UPS)	(주)크로마아이티		박윤서	‘13.05.13	‘13.06.28	‘16.04.30
	13) 배선반	국제텔레시스(주)		박병헌	‘13.03.27	‘13.04.25	‘16.04.30

□ 추진현황(선행공정 지연으로 정보통신공사 공정 추진 지연)

▣  7월 공정현황   : 계획 99.62% , 실적 95.70%(대비 96.06%)

※  6월 공정현황 : 계획 99.25% , 실적 95.70%(대비 96.42%)

▣ 정보통신설비공사

○ 추진사항

위 치	공 종	단위	설계량		금월(14.07.01 ~14 07 30)								누계(14.07.30현재)						계획 (14.08.01 ~08.30)			완 료 예정일
					계획			실적			대비 (%)		실적			공정율 (%)
본 선	케이블트레이	M	5,267										5,267			100						완료
	케이블(광,동)	M	18,159										18,159			100						완료
	누설동축케이블	M	8,761										8,761			100						완료
정거장	전선관	M	37,188		456						0		36,732			98.8			456			‘14.08
	케이블, 전선	M	178,803		699						0		175,422			98.1			3,381			‘14.08
	출입통제설비	식	5										5			100						완료
	구분				금월(실적/계획)								누계(실적/계획)
					926	927	928		929	930		계	926	927	928		929	930		계
																				%
	콜폰	개	70	실적																		‘14.08
				계획									15		14		14	27
	인터폰	개	39	실적																		‘14.08
				계획									8	6	8		7	10
	비상통화장치	개	30	실적																		‘14.08
				계획									6	6	6		6	6
	음성유도기	개	179	실적																		‘14.08
				계획									42	27	35		35	40
	방송스피커	개	631	실적											10		10			20	50	‘14.08
				계획									131	88	115		119	178		3
	복합통신안테나	개	21	실적										2			1			3	5	‘14.08
				계획									5	3	4		3	6		14

▣ 정보통신구매설치

○ 추진사항

장 비 별	단위	수량	전월까지 (13.04.02~14.06.30)			누 계 (14.07.30현재)			종합공정(%)	완 료 예정일 (2단계)	비고
			계획	실적	대비	계획	실적	공정율
정보통신설비 구매			86.8	88.5	102	5.2	2	38.5	90.5	‘14.09
자동요금징수설비	식	1	74.1	72	97.2	14.1	6.8	48.2	78.8	‘14.08
자동방송설비	식	1	92	92	100	4	0	0	92	‘14.09
무정전전원장치(UPS)	식	1	100	100	100				100	‘14.09

○종합계획 및 실적

단위 : %

구 분	계 획	실 적	대 비	비 고(보활)
계	93.33	90.07	96.51	100.00
정보통신설비공사	99.62	95.69	96.06	19.36
정보통신설비 물품구매설치	92.10	90.50	98.26	59.21
자동요금징수설비	88.20	78.80	89.34	15.30
자동방송설비	96.00	92.00	95.83	2.78
무정전전원장치	100.0	100.0	100.0	2.60
배선반	100.0	100.0	100.0	0.75

						추진방향

□ 주요추진사항

구 분	전 월 (2014년 07월)	금 월 (2014년 08월)
1) 현장시공 현황	○ 정거장 시공 - 외부출입구 수공인입용 실링가스켓 취부 - 음성유도기(B1층) 음성유도기 입선작업 - 통신실 ACU 케이블 점검 - 게이트용 덕트 취부 및 고정 -게이트, 정산기용 케이블 포설(전원, 접지,인터폰) <종합운동장역> - MIS광케이블 배관 및 입선작업 - MIS 장비 철거 및 신설 - 케이블 포설, 성단 작업 ○ 정거장 AFC용 바닥석공사 완료시기 - 915~917공구 석공사 완료시기 요청(07.11) - 915, 916 공구 8월말~9월중순, 916공구 10월 완료 예정	○ 현장시공 <926~930 정거장> - 방송스피커, 복합통신안테나 설치 작업 - AFC용 덕트취부 및 입선, 각종 케이블 점검 <종합운동장역 대합실> - AFC게이트 케이블 입선 작업(08/08~) - AFC게이트 덕트 및 스피드게이트 베이스 찬넬 취부 ○ 임대상가 실정보고 ○ 설계심의 요청 - 927정거장 통합역무실 이전외 3건 - 음성유도기, 임대상가 건

구   분

전 월 (2014년 07월)

금 월 (2014년 08월)

2)정보통신설비구매설치

○ 주전송 설비 구성

- 1단계 연동작업 준비(NMS)

- 센터 이더넷카드 증설 및 경로설정 작업

○ 행선안내게시기

- 1단계 S/W운용 교육(유지보수자 조별 4회)

- 1단계 HSE BIS 연동시험 (08일~17일)

- 2단계 장비제작

○ 열차무선설비

- 927 역사 중계기 NMS 최적화 작업

- 926, 927, 929, 930 중계기 S/W Update

- MTIG 통화테스트

○ 정거장영상설비

- 승강장 브라켓 설치(927 4개, 928 4개)

구분	설계량	금월		누계
		브라켓	카메라	브라켓	카메라
926	10/44	0	0	2
927	8/30	4	0	4
928	12/39	4	0	12
929	8/40	0	0	8
930	12/49	0	0	12
계	50/201	8	0	34

○ 교환 및 관제전화 설비

- 자체테스트 및 확인

○ MIS 설비

- 1단계 연동관련 준비

- 현장테스트 및 확인

○ 주전송 설비 구성

- 1단계 연동 작업준비(NMS)

- 이더넷 경로설정 확인작업

○ 행선안내게시기

- HSE 절체(8/18)

- 1단계 운영사 관제운영팀 교육(08/18)

- 2단계 공장검사 시험(08/26)

○ 열차무선설비

- CAD Client Update 및 모니터링(~08/29)

- CAD 서버 연동관련 협의

○ 대열차 공간화상설비

- 2단계 신호연동 시험 협의(08/14)

○ 정거장 영상설비

- 926, 927 승강장 브라켓 설치(~08/8)

- 선로전환기 카메라 설치(08/26,27)

- 929 변전실 카메라 설치(08/28)

○ 교환 및 관제전화설비

- 자체 테스트 및 확인

○ MIS 설비

- 1단계 연동관련 준비

○ 종합무선설비

- 1단계 연동작업(08/01~09/30)

- 통신실 내 광점퍼케이블 연결(08/04~08/06)

3)자동방송설비

○ 1단계 연동테스트

- 개화산역 TCP/IP Controller 설치 및 음원업로드 결과 성공/실패 여부 확인 불가

- 1단계 역사는 현장방문 업로드 추진

○ 2단계 방송설비 점검(08/19~21)

4)무정전       전원장치

○ BMS하부 고무판 삽입(07/09)

- 926~930 작업후 프로그램 정상동작 확인

※ BMS : Battey Management                 System

구 분	전 월 (2014년 07월)	금 월 (2014년 08월)
5)역무자동 화설비	○ 종합운동장역 장비 - 발매기/정산기/환급기 반입완료(07/11) - 슬림게이트 설치공사(GS건설 등 협의완료) ○ 2단계 역사용 장비 - 개집표기 : 양산 진행중 - 장비S/W : 개발 및 단위시험 진행중 ○ KSCC 무상공급 - 센터S/W : 개발 및 단위시험 진행중 - 개집표기용 RF단말기 : 개발 및 양산 완료 - 휴대용정산기 KC 인증 진행중	○ 종합운동장역 - 슬림게이트 베이스설치 공사(8/7~) 대리석제거->베이스설치->대리석마감 ○ 2단계 역사용 장비 - 개집표기 공장검사(08/8 예정) - 장비S/W : 단위시험 완료, 통합시험 진행 ○ KSCC 무상공급 - 센터S/W : 단위시험완료(08/14) 통합시험 진행(08/18~10/15) - 중앙전산기 등 센터용 장비 입고 : 설치 위치 이슈(서울메트로와 협의 후 진행) - 휴대용정산기 KC 인증 완료

						회 의 내 용(지시사항)

▣  국장님 8월중순 스마트카드 방문예정으로 시험 일정 등 업무추진에 문제 없도록 할 것

▣  기술시운전 실시전에 국토부 제출자료 준비

▣  AFC 일정계획(스마트카드시험 10월중순, 현장설치 10월30일)에 차질없도록 추진

▣  AFC분야 공장검수 완료된 장비는 현장반입전에 철저히 포장하여 습기로 인한 문제가 발생하지 않도록 조치

▣  9호선2단계 운영사는 메트로가 우선협상대상자로 선정

▣  설치 장비 명찰 부착

▣  설비공사 건은 정거장 토목,건축 등 선행공정이 완료되지 않아 9월 준공 불가 하므로  공기연장 및 실정보고, 설계변경 조치

- 임대상가 통신공사는 건축분야에서 운영예정사와 협의후 방침 예정으로 시기상 우선 실정보고

□ 시공 안전 및 기타

▣  정거장 부분 작업시 안전취약요소 사전제거 및  안전예방 철저

붙임 : 공정회의 결과(감리단) 보고. 끝.