함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	계약기간 연기요청 의뢰(도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사 교통소통대책수립 용역)

1. 우리과에서 시행하고 있는 『도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사 교통소통대책수립 용역』에 대하여 계약기간 변경 사유가 발생되어 아래와 같이 연기요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약기간 변경

1) 건    명 : 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사

교통소통대책수립 용역

2) 계 약 자 : ㈜ 현성 교통기술연구원 김연기

3) 용역기한

- 당초 : 2014.02.21.~2014.08.19

- 변경 : 2014.02.21.~2014.11.19

나. 귀책사유 : 북부수도사업소(지체상금 미부과)

따로붙임 : 용역기한연기 방침서 1부.  끝

	시설관리과장
주무관	이문성		시설관리과장	08/11 김영훈
협조자	주무관	임종진
시행	시설관리과-11951	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-3392	/전송		/	lhs329900@seoul.go.kr	/	대시민공개