문서번호	생태공원과-1856
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생태공원과장	공원부장
임이환	최병언	전결 08/11 代박노원

암사생태공원 전기/통신공사 발주계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

공 원 부

암사생태공원 전기/통신공사 발주계획

한강암사생태공원에 생태교육실을 확충하여 자연학습 공간을 제공하고 한강접근 탐방로를 설치하여 공원이용에 활성화에 기여하고자

아래와 같이 암사생태공원 확충 및 정비를 위한 전기/통신공사를 시행코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

❍ 녹지관리과-3611(‘14.7.30) 『암사생태공원 시설확충 및 정비공사시행」

Ⅱ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 암사생태공원 시설확충 및 정비를 위한 공사

❍ 공사기간 : 착공일로부터 90일간(2014. 9 ~ 11.30)

❍ 공사위치 : 강동구 암사동 613-11일대(암사생태공원내)

❍ 공사내용

- 건  축  공 : 교육프로그램실(컨테이너형) 1동 151.67㎡

- 조경시설공 : 데크설치 395㎡, 황토포장 504㎡, 의자 5조 등

- 식  재  공 : 사철나무 외3종 27,296주(본)

- 전기/통신공 : 배관ㆍ배선 1식, 조명기구 / AV시스템, 전화시설

Ⅲ		예 산 사 용

❍ 예산과목 : 한강사업본부, 한강공원관리및운영, 한강공원시설물관리및

개선, 생태공원운영및관리, 시설비(100-401-01)

❍ 예산내역

구 분	건축/조경/식재	전기	통신
소요예산	472,006,560원	52,140,000원	18,150,000원

Ⅳ		발 주 계 획

<전기공사>

❍ 공 사 명 : 암사생태공원 시설확충 및 정비 전기공사

❍ 공사기간 : 착공일로부터 80일

❍ 계약방법 : 전자공개수의계약(총액)

❍ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자를 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및                  동법 시행규칙 제14조 규정

❍ 공사금액 : 52,140천원(VAT 포함)

❍ 입찰참가자격 : 전기공사업 등록을 필하고 주된사무소가 서울시에 소재한 업체

❍ 공사내용

- 한전인입 전력간선공사 1식

- 가설콘테이너내부 전등 및 전열공사 1식 등

<통신공사>

❍ 공 사 명 : 암사생태공원 시설확충 및 정비 통신공사

❍ 공사기간 : 착공일로부터 70일

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 계약근거 : 지방자치단체를 당사자를 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 5호

❍ 계약사유 : 금액이 소액으로 최적의 AV시스템을 구축하기 위해서는 전문업체로서                   시공경험이  많은 기술자가 시공하여 품질확보 및 향후 유지관리에 만                   전을 기하고자 함.

❍ 공사금액 : 18,150천원(VAT 포함)

❍ 공사내용

- 교육장 AV시스템 구축 1식

- 가설콘테이너내부 통신 배관 및 배선공사 1식 등

Ⅴ		향후계획

❍ 계약의뢰  : ‘14. 8. 12

❍ 공사기간  : ‘14. 9 ~ 11

❍ 공사준공  : ‘14. 12

붙임 : 1. 전기공사 내역서 1부.

2. 통신공사 내역서 1부.  끝.