투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2014년 특별시도상 불량맨홀 정비공사-남부)

우리사업소에서 시행중인 2014년 불량맨홀 정비공사(연간단가)에 대하여 아래와 같이 설계변경(1차)시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 특별시도상 불량맨홀 정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014.3.28 ~ 2015.2.28

다. 계 약 자 : 대실테크(주) 대표 유조웅

라. 설계변경(1차)내역

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 / 감	비고
도 급 비	521,255,000	521,255,000	-	내역 물량변경

마. 변경사유 : 작업여건 변화에 따른 물량조정(546개 ⇒ 519개)

바. 예산과목 : 도로관리과, 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리

(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

붙  임 : 1. 설계변경사유서 1부.

2. 설계변경(1차)내역서 1부.  끝.

주무관	정철식		도로보수과장	김승태		남부도로사업소장	08/12 민승기
협조자	주무관	정규용		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-4460	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울특별시 영등포구 도림로 145(대림동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02)3284-5442	/전송	02)842-1634	/	mjcs0005@seoul.go.kr	/	대시민공개