문서번호	토목부-10029
결재일자	2020.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이성열		박일연	05/22 김용제
협조

임대사무실 임대기간 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

2020. 05.

도시기반시설본부

(토  목  부)

임대사무실 임대기간 변경 검토보고

- 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업 -

『창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업』의 실정보고(임대사무실 임대기간 변경)건과 관련 검토하고 결과를 보고 드림.

*******************************************************

Ⅰ		관 련 근 거

□ 창덕궁감2020-113호(2020.05.20.): 실정보고건 제출(사무실 임대기간 변경건)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 사 업 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업

□ 규    모: 도로정비 B=6.5~22m, L=1,630m

□ 사업기간: ’18.12.26. ~ ’20.08.31.

□ 도 급 비: 6,725백만원(1차 5,800백만원, 2차 925백만원)

**************************

************************

Ⅲ		보 고 내 용

□ 공사기간 연장에 따른 사무실 임대비용 반영

○ 공사기간 : 당초) 2018.12.16. ~ 2019.12.31.(12개월)
→ 변경) 2018.12.16. ~ 2020.08.31.(20개월)

○ 임대기간

항 목	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
임대사무실	개월	12	19	7	실제 임대기간 적용

□ 개략공사비 변경내용

○ 개략공사비 변경내역

[단위 : 원]

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
공급가액	39,090,909	62,727,273	23,636,364
부 가 세	3,909,091	6,272,727	2,363,636
계	43,000,000	69,000,000	26,000,000

□ 책임건설사업관리기술자 검토의견

○ 종로구 추가 요청사항 반영, 공사구간 내 행사 등으로 인해 당초보다 8개월의 공사기간이 연장될 수밖에 없는 실정임.

○ 공기연장에 따른 사무실 임대비용에 대하여 실계약 및 집행부분을 변경함이 타당하며, 도급단가 적용이 합당하다고 판단됨.

Ⅳ		조 치 의 견

□ 공사계약일반조건에 의거 공사기간 연장에 따른 사무실 임대비용 반영이 적정하다고 판단되며,

□ 추후 설계변경시 내역에 반영하고, 실비를 초과하지 않는 범위내에서 정산하고자 함.

붙임 : 실정보고건(창덕궁 사무실 임대기간 변경건) 제출 공문 1부.  끝.