투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장실정보고(용역비용) 재검토 요청

1. 공사감독1처-7114호(2014. 8. 7)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 현장실정보고(용역비용)건에 대해 내용을 검토한 결과 기 승인처리된 염창2 빗물펌프장 토출관로 추진공법의 변경은 적정하므로 시공사의 요구사항인 발주처 요구로 인한 추가 안정성 검토 비용 요청은 타당하다는 의견이며,

3. 비용 산출 부분에 있어서 시공사는 16,000천원을 요구하였지만 공단 보고서에는 6,600천원이 적정하다고 검토하였으나 그 사유가 누락되어 있어 내부 검토보고서 작성이 곤란한 실정이므로 본 건은 건설기술진흥법 제63조 및 붙임 계획을 참조하여 재검토를 하여 주시고 현장 실정보고사항의 보고시기가 너무 늦게 처리되는 경향이 있으므로 보고시기를 잘 맞추어 보고하여 주시기를 바랍니다.

붙임 : 공사장 안전사고 예방을 위한 안전관리 비용에 대한 계약심사 강화계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		방재시설과장	서관석		방재시설부장	08/12 임춘근
협조자
시행	방재시설부-7577	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개