다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	금천청소년수련관 기능보강사업 변경계획 승인 통보

1. 금천청소년수련관-14358(‘14.6.20)호 및 2222(’14.8.6)호와 관련입니다.

2. 2014년 금천청소년수련관 기능보강사업 추진 중 아래와 같은 사유로 사업계획변경(일부) 신청한 사항에 대하여 검토한 결과 다음과 같이 승인 통보하오니 품질을 확보하고 안전한 공사가 될 수 있도록 만전을 기하기 바랍니다.

가. 사 업 명 : 시립금천청소년수련관 기능보강사업

나. 기존 기능보강사업비 교부내역

(단위 : 천원)

시 설 명	사 업 내 용	기 교부액	계
금천청소년 수련관	흡수식 냉온수기 교체공사	102,000	173,000
	옥상 방수공사	51,000
	유아스포츠단 화장실 설치공사	20,000

다. 사업계획 변경계획 승인내용

구분	당초계획	변경계획	변경사유
사업내역	○ 흡수식 냉온수기 교체공사	○ 냉난방 개선공사	- 교체 예정인 흡수식 냉온수기 수련관 기계실 반입불가하여 설치가 불가능함(소견서 첨부) - 개별 냉난방시스템은 흡수식 냉온수기에 비해 유지관리비용이 적게 발생함 - 현 사용중인 1기의 냉온수기와 새로 설치할 냉난방기 효율적 운영으로 에너지 절감
	- 사업비 : 102,000천원	- 사업비 : 102,000천원 (※예산범위 내 개별냉난방설치로 예산 추가 없음)
검토결과	○ 기계실 반입 통로가 좁아 흡수식 냉온수기를 최소 분할 규격에도 반입이 가능한 제품이 없고, 개별 냉난방으로 변경할 경우 에너지 효율성 증대 및 유지관리비용 절감 효과를 기할 수 있어 변경계획이 타당하다고 판단되므로 사업계획 변경 승인함.

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시청소년시설협회장,시립금천청소년수련관
주무관	조한근		시설팀장	손형권		아동청소년담당관	08/12 김영기
협조자
시행	아동청소년담당관-18623	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 31(세종대로 110) 서울시청	/	www.seoul.go.kr
전화	02)2133-5149	/전송	02)2133-0733	/	hgiam@seoul.go.kr	/	대시민공개