문서번호	교량보수과-2406
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
안창용		08/12 이용재
협조

공사현장 작업기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

남부도로사업소

(교량보수과)

공사현장 작업기간 연기 검토 보고

- 한강교량 일상유지보수공사 -

『한강교량일상유지보수공사』 추진중 책임감리원으로부터 작업기간

연기 요청이 있어 이에 대한 검토 보고사항임

공사개요

공 사 명 : 한강교량 일상유지보수공사

공사기간 : 2014.05.22 ~ 2015.02.28

공사개요 : 교면포장 및 방수, 신축이음 보수, 균열보수, 단면보수 등

공사금액 : ￦1,680,935,400원

시 공 사 : ㈜한울건설외 1

감    리 : (주)대한컨설턴트

감리 실정보고 내용

실정보고사항   : 작업기간 연기

- 작업지시번호 : 2014-7호(2014.07.07)

• 반포대교 접속교 구간 아스팔트표면처리(A=5,034㎡)

• 작업기간 : 2014.07.08. ~ 2014. 08. 15

• 작업기간 연기사유

작업기간중 장마철 지속적인 강우로 인한 지연

- 감리검토보고서 : 별  첨

• 시공사 연기요청(책임감리) : 2014. 8. 11

• 책임감리 검토 : 2014. 8. 11

검토의견

실정보고 사항인 작업기간 연기는 현장여건을 반영한 사항으로서,

책임감리원 검토의견과 같이 작업기한 연장을 승인처리코자 함.

- 작업기간 변경

작업지시	작업기간 변경		비고
	당 초	변 경
2014-07호 반포대교 아스팔트 표면처리	2014.07.08~08.15	2014.07.08~09.05

따로붙임 : 책임감리원 검토보고서 1부.  끝.