문서번호	정보자원운영과-1917
결재일자	2014.8.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
박종순		김영숙	08/12 이계헌
협조
	인터넷통신과장		김진하

-2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강사업-

착수보고회 개최 계획

2014. 8.

데이터센터

[정보자원운영과]

- 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강사업 -

착수보고회 개최 계획

「2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강」사업 착수 보고회를 개최하여 센터 분야별 담당자 및 업무부서 담당자와 사업 수행방안 및 추진일정 공유를 통해 사업을 성공적으로 추진하고자 함

1	착수보고회 개요

○ 일  시 : 2014.8.18(월) 16:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 데이터센터 1층 제3교육장

○ 참  석 : 50명 내외

- 데이터센터 : 소장, 각 과장, 업무분야별 주무관

- 세  무  과 : 재정사업단장, 세외수입팀장, 업무분야 주무관

- 업 무 부 서 : 사업관련 업무부서 담당 주무관

- 사  업  자 : 쌍용정보통신㈜ 사업 수행인력

○ 주요 보고내용

- 백오피스(내부행정, 민원행정), 프론트오피스 시스템 H/W, S/W 구축 및 설치

- 세외수입종합징수시스템 서비스(AP), 연계서비스 이관, 성능 최적화 컨설팅

- DB이관 및 마이그레이션 방안

○ 진행일정

시 간	진행 내용	진행
16:00 ~ 16:05	․ 사업 추진경과 보고	사업담당자
16:05 ~ 16:30	․ 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강 사업수행 방안	수행업체 (PM)
16:30 ~ 16:45	․ 토론 및 질의응답	참석자
16:45 ~ 16:50	․ 인사말씀(소장님, 재정사업단장)
17:00 ~ 18:00	․ 각 분야별 업무협의	참석자

2	사업 개요

○ 사 업 명 : 2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강

○ 사업기간 : 2014.07.29 ~ 2015.01.25.(180일간)

○ 계약금액 : 6,580백만원

○ 계약업체 : 쌍용정보통신(주)

○ 사업내용 : 21개부서 26개사업 IT인프라 구축

- 유닉스 통합서버 2식 신규 도입 및 파티션 증설

- 소형서버 7식 신규 도입 : 가상서버 2식, 윈도우서버 2식, 리눅스서버 3식

- 블레이드 서버 5식 및 블레이드 새시 1식 신규 도입 : 리눅스서버 4식, 윈도우서버 1식

- 스토리지 증설 : 업무관리 스토리지 가용량 50TB, 통합스토리지 가용량 13TB, 가상화통합스토리지 가용량 3TB, 세외수입스토리지 가용량 30TB, 정보소통광장 홈페이지 유지관리 및 기능 보완 스토리지 48TB

- 신규스토리지 3대 도입 : 문서공개시스템 업무용 NAS스토리지 가용량 32TB, 민원행정 가상화통합스토리지 가용량 20TB, 서울일자리플러스센터 전산망 고도화 전용 스토리지 가용량 4TB

- 백업장비 라이브러리 1식(LTO5 22) 신규 도입 및 드라이브 11개(LTO4 4, LTO5 7) 교체/증설

- 백업용스토리지 증설 : 42TB 증설

- DBMS, 성능 모니터링 S/W, 업무용 패키지, 백업 등 S/W 구입 및 서비스 이관, 이중화 구성 등

- 세외수입종합징수시스템 AP이관 및 이중화, DB 성능최적화

○ 추진경과

- 기본계획 수립(단장방침)                    : ’14. 3.12

- TFT 운영계획                              : ’14. 3.18

- 계약심사단 계약심사                         : ’14. 4. 4~4.15

- 계약심사심의위원회 심사                     : ’14. 4. 7~4.10

- 사업 세부추진 계획(단장방침)                : ’14. 4.25

- 일상감사(1차 : ’14.3.5~3.11)             : ’14. 4.24~5. 1

- 제안요청서 검토                             : ’14. 4.29~5.13

- 보안성 검토 요청                            : ’14. 4.29

- 계약심사(수입 및 특정제품 선정 심의위원회)  : ’14. 5. 9~5.23

- 제안요청서 사전 규격 공개                   : ’14. 5.22~5.6

- 입찰공고                                     : ’14. 6. 2~7.3

- 제안요청서 평가 및 사업자선정               : ’14. 7. 9~7.29

- 계약체결                                     : ’14. 7.29

3	향후 계획

○ 착수보고회 결과 보고        : 2014.  8월

○ 입주검토 및 설치계획서 검토 : 2014.  8월

○ 장비 입주 및 설치           : 2014.  9월 ~ 10월

○ 업무 서비스 탑재 및 이관(업무 오픈) : 2014. 10월 ~ 12월

○ 부분 검수 및 최종 검수      : 2014. 11월 ~ 2015. 2월

붙임 : 2014년 정보자원 통합인프라 구축 사업대상 부서현황 1부.  끝.