문서번호	교량보수과-5152
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	교량보수과장
정병구		백운경	08/13 代백운경
협조

『2014 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

서부도로사업소

(교량보수과)

『2013 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』

설계변경 검토보고

우리 사업소와 도급계약을 체결하고 시행중인 『2014 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)』 추진중 책임감리원으로부터 설계변경(1차) 보고가 있어 이에 대한 검토 보고사항임.

공사개요

공 사 명 : 2014 한강교량 일상유지보수공사(연간단가)-서부

공사기간 : 2014.04.09 ~ 2015.02.28

공사개요 : 교면포장 및 방수, 신축이음 보수, 균열보수, 단면보수 등

계약금액 : ￦876,391,350원

시 공 사 : ㈜케이디엠건설 대표 강영숙

감    리 : ㈜대한콘설턴트,(주)신명건설기술공사

감리 실정보고 내용(대한감본 14-252호)

설계변경 사유

• 작업지시(1~15차)에 의한 공사시 현장여건에 따른 수량 증․감을 내역에 반영

• 신규공종(NEW F/J 보수 외 26) 반영

변경공사비

구 분		공 사 금 액			공사기간	비 고
		당 초	변 경	증․감
전체사업	도급비	876,351,350	876,351,350	-	2014.04.09 ～ 2015.2.28	내역 (물량) 변경
	관급비	53,000,000	53,000,000	-
	건설폐기물처리비	5,400,000	5,400,000	-
	계	934,751,350	934,751,350	-

검토의견

제반 설계도서를 검토한 바, 단가 및 수량이 적정하게 산출된 것으로 판단되어 책임감리원 보고내용과 같이 설계변경 시행코자 함.

첨 부 : 1) 책임감리원 설계변경 보고 1부.

2) 설계변경내역서 1부.

3) 작업지시 현황 1부.   끝.