문서번호	도시철도설비부-7495
결재일자	2014.8.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★송변전과장	도시철도설비부장
이재영		代김흥정	08/13 정찬웅
협조

송변전분야 공사(납품)기한 연기 보고

(지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사 외 4건)

2014.  8.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

송변전분야 공사(납품)기한 연기 보고

(지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사 외 4건)

우리본부에서 시행중인 지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사와  AC, DC, ESS, 원방제어설비 제작설치 계약건에 대한 원활한 시운전과 개통이후 준공을 위해 공사(납품)기한을 연기코자 보고 드림

□ 계약현황

계 약 명	송변전공사	DC설비 제작․설치	AC설비 제작․설치	에너지저장장치설비	원격감시제어시스템	비고
계약번호 (관리번호)	1212081600 (121086900)	12132000600 (12132000600)	12122311600 (12122311600)	12132000900 (12132000900)	12122302200 (12122302200)
계 약 일	2012. 12. 27	2013. 01. 07	2012. 12. 28	2013. 01. 08	2012. 12. 27
계약금액	3,392,885천원	1,483,870천원	1,150,000천원	966,000천원	429,000천원
납품기한	2014. 09. 11	2014. 08. 30	2014. 08. 20	2014. 08. 31	2014. 08. 19
계 약 자	세세건설(주)	이화전기공업(주)	㈜일산전기	㈜우진산전	㈜비츠로시스

□ 납품기한 연기내용

계 약 명	납품기한 연기		연기사유
	당초	변경
지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사	2014.09.11	2015.03.31	○ 지하철9호선연장건설(2단계) 송변전공사 시방서 “1.1.1- 1)-바)” 『공사기간』 ○ 변전장비 제작․설치지침서 1.13”「대금지불 조건」에 의해 개통일정에 맞추어 공사(납품)기한 연기
지하철9호선연장건설(2단계) DC설비 제작․설치	2014.08.30	2015.03.31
지하철9호선연장건설(2단계) AC설비 제작․설치	2014.08.20	2015.03.31
지하철9호선연장건설(2단계) 에너지저장장치 제작․설치	2014.08.31	2015.03.31
지하철9호선연장건설(2단계) 원방제어설비 제작․설치	2014.08.19	2015.03.31

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 연기사유 : 개통일정 변경에 따른 준공기한 연기

□ 조치의견

○ 지하철9호선연장건설(2단계) 원활한 시운전과 송변전공사 시방서 1.1.1 및 변전장비(DC, AC 에너지저장,원방제어설비) 제작설치 지침서 13-1』에 의거 원활한 시운전 및 계통이후 준공처리를 위해 2015. 3. 31로 공사(납품)기한을 연기코자 합니다.

따로붙임 : 1. 송변전분야 계약서 사본  1부.

2. 계약자별 합의서 각 1부.  끝.