함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	준공기한 연기 결정[도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사 교통소통대책 수립 용역]

1. 시설관리과 - 11951(2014.08.13)호와 관련입니다.

2. 『도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사 교통소통대책 수립 용역』건에 대한 준공기한 연기사유가 발생하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 계약 현황

상 호	대 표 자	계약 금액(원)	계약 일자	당초 준공기한
(주)현성교통기술연구원	김연기	15,385,000	2014.02.21	2014.05.19

나. 계약 변경 사항 : 준공기한

- 당초 : 2014. 05. 19

- 1차 변경 : 2013. 08. 19

- 2차 변경 : 2013. 11. 19

다. 연기사유 : 도봉세무서~미아삼거리역간 송배수관정비공사 신기술 공법선정 지연

인한 준공기한연기

라. 귀책사유 : 북부수도사업소

마. 지체상금 부과여부 : 미부과(지방자치단체 공사계약일반조건 제8절-1-다에 의거)

바. 선금 선금지급 : 미지급

따로붙임 :  준공기한 연기 보고서 등 각1부.  끝.

주무관	한경란		행정관리팀장	조기열		행정지원과장	정의석		북부수도사업소장	08/13 이종백
협조자
시행	행정지원과-14389	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	3146-3245	/전송		/	sobongh@seoul.go.kr	/	부분공개