문서번호	시설보수과-3156
결재일자	2014.8.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	08/13 정진오
협조

자문회의(2차) 및 특정제품 선정심사위원회

개최결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역]

2014. 8.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(시설보수과)

자문회의(2차) 및 특정제품 선정심사위원회

개최결과 보고

[시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역]

우리 사업소에서 추진중인 「시조사삼거리 교차로구간 개선공사 실시설계용역」에 대하여 자문회의(2차) 및 특정제품 선정심사위원회 개최결과 보고임

관련근거

❍ 행정제1부시장 방침 제559호(2009.11.12.)

❍ 계약심사과-16194(2009.11.13.) 및 계약심사과-17149(2009.11.30.)

❍ 시설보수과-3036(2014.08.05.) 자문회의(2차) 및 특정제품 선정심사위원회

개최계획 보고

용역개요

❍ 용 역 명 : 시조사삼거리 교차로구간 개선(청량제1고가 성능개선 포함) 공사 실시설계용역

❍ 용역개요

도 로 명	구 간	도로폭원	차로수 (양방향)	규제속도	과 업 내 용	비 고
왕 산 로	청량리↔시조사	30.1	6	60㎞/h	1개 차로 추가 178m (보도육교 철거 포함)
망 우 로	시조사↔망우동	28.9	6	50㎞/h	1개 차로 추가 128m (고가 성능개선 포함)
이 문 로	시조사↔이문동	30.0	6	50㎞/h	선형 조정

❍ 용역기간 : 2014.04.03.~2014.09.29.

❍ 용 역 비 : 113,190천원

❍ 용 역 사 : ㈜유경기술단 외 1개사

자문 및 심의

❍ 일    시 : 2014.08.12.(화) 14:00 ~

❍ 장    소 : 성동도로사업소 방촌당(2층)

❍ 자문 및 심의 주요내용

- 초기 자문회의 검토결과 보고

- 청량제1고가의 기존 교대 사용성 및 안정성 검토내용 보고

- 청량제1고가의 상부구조 및 철거공법 형식 검토 보고 및 심의

- 교통처리계획(안) 보고

❍ 자문 및 심의 방법 : 용역사 설명 후 참석위원 의견개진 및 공법 선정

심의 의견

❍ 참석위원  : 6명 전원참석

구 분	대상종류	선정	심 의 의 견	**
상부구조형식	E-support 프리플렉스 합성형	O	구조성능이 확실하며, 시공성, 안전성 및 경제성 등 제반 현장여건 등에 가장 부합되는 공법. 향후 유지관리 유리	6명 중 5명 동일안 선정 ********************
	Multi PSC Box Girder
	CPI 빔교
	DB 합성거더
작업장 설치법	일반 비계		가설현장의 철도 통과 등을 고려할 때 안전성 확보 필수적임 (낙하물 방지시설 보완 필요)
	과선교 해체공법	O
	브램프 공법
상부거더 인양공법	재래 공법		협소한 작업장에서 장비거치 및 작업시간 단축
	개선공법 (런칭용 가설 작업대)	O

기타 자문의견

❍ 기존 교대를 재활용함에 있어 복원도에 대한 재확인 필요(철도청의 정규도 참조)

❍ 교대 재활용과 관련 강도유지 및 내구성 감안하여 표면처리 공법 적용 검토

❍ 기존 교대의 공용기간이 45년 정도로 이후 재령에 따른 강도변화와 설계 현 시점에서 사용년한 명시 필요(외국사례 등 자료 보완)

❍ 교대 하부 지지력 미확인 상태로 신설 또는 단면확대 방안 검토

❍ 교대 안전성 검토시 지진하중은 허용치에 근접하므로 추가 안전성 확보 필요

❍ 기존 교대에 연결된 옹벽, 석축의 상태도 점검, 안정성 여부 확인 필요

❍ 기존 PSC 빔 철거시 대차활용이 트레일러보다 구조적 유리한 사유 검토 제시

❍ 현재 보도와 차도 단차를 신설 교량의 구조는 동일하게 시공할 것. 단 신축이음부 등 배수 처리방안 검토, 철도 구간에 낙수 발생하지 않도록 조치

❍ 공사중 보도를 차도로 사용시 단차 및 구배처리는 포장재료 등 감안 설계

❍ 사교의 특성상 Cross Beam 위치가 제각각임으로 사방향으로 설치 검토

❍ Beam 제작장은 가까운 곳으로 하고, 운반 동선을 검토하여 품질저하 방안 강구

❍ 교좌장치 선정에 있어 가동성, 내구성 등을 감안하여 선정

❍ 교통처리 차원에서 교량을 1/2씩 시공에 따른 안전성에 대한 구조적 검토 필요

❍ 거더 가설에 따른 교통소통을 감안한 작업시간 등을 고려한 공정계획 수립

❍ 육교 철거시 주민들의 안전한 횡단통행을 위한 동선계획 수립

❍ 공사중 차로 축소에 따른 동선계획 수립 및 민원 최소화 방안 검토

❍ 공사중 교통처리계획시 교통섬과 도류화 등을 조정, 교차로상 차로운영 개선 필요

❍ 가로변 버스전용차로의 경우 폭 3.0m를 3.5m이상 확보 방안 검토

❍ 망우로에서 외대방향 우회전 차로의 경우 차선분리봉 설치 권장

❍ 하부 등은 철도공사에서 직접 점검 및 유지관리 방안 등 철도청과 협의 필요

❍ 보고자료에 데이터 상이한 부분에 대한 재검토 필요(기존 교대 전도, 활동 안전성 검토시 데이터 등)

의견반영 및 향후계획

❍ 상기 심의의견을 토대로 공법(제품) 적용하되, 추가 필요한 공법이나 제품에 대하여는 적정성 검토 후 설계사 보고에 따라 추가 선정

❍ 기타 자문의견에 대하여는 설계사 검토 및 반영여부를 보고받아 조치. 단, 교대와 관련된 콘크리트 잔존수명 등에 관하여는 관련 자료를 수집하되, 필요시 전문가(콘크리트, 구조, 진단 등) 자문 필요성 검토 후 보고토록 조치

❍ 심의결과 및 승인사항 반영, 설계 자문 및 각종 심의 득한 후 용역 준공

붙임  1. 참석자 및 검토의견서 각 1부.

2. 회의사진 1부. 끝.