문서번호	시설보수과-3166
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		동부도로사업소장
김희철	김호규	박용선		08/14 송상영
협 조

천호지하차도 보수공사 자문회의 결과보고

2014. 8.

동부도로사업소

[시설보수과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

천호지하차도 보수공사 자문회의 결과보고

「천호지하차도 보수공사」와 관련 벽체부가 불균일한데 따른 합리적인 유지관리와 운전자의 심미적 영향 등을 고려한 보수·보강공법에 대한 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고함.

	Ⅰ	공 사 개 요

○ 공 사 명 : 천호지하차도 보수공사

○ 공사기간 : 2014. 6. 2 ~ 11. 28

○ 공사개요 : 타일철거 2,800㎡, 타일붙이기 1,379㎡, 표면보수 1,452㎡

○ 도 급 액 : 금651,532,590원

○ 도 급 자 : 세안이엔씨(주) 대표 이은상

○ 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단

	Ⅱ	추 진 경 위

○ ‘14.04.15 천호지하차도 보수공사 내장공법 검토보고

- 타일철거후 BOX구간 타일시공, U-Type구간 표면처리(도장) 공법

○ ‘14.04.17 특정제품(공법) 심사위원회 개최

- U-Type구간 표면처리(도장) 리코(RECOH)공법 선정

○ ‘14.07.08 실정보고서 접수

- 조적블록에 타일이 설치되어 있어 몰탈 제거시 조적블록 파손

○ ‘14.07.11 현정실정 검토 보고

- 조적블록 철거하고 구조물 Con’c 벽면에 타일 및 표면처리토록 변경

※ 구조기술사 자문결과 : 첨부

○ ‘14.07.16~19 U-Type 구간 조적블록 철거

○ ‘14.07.21 ~ 현재 천호지하차도 보수방안 재검토

	Ⅲ	자문회의 개요

○ 일   시 : 2014. 8. 11(월) 16시

○ 장   소 : 사업소 2층 회의실

○ 참 석 자

- 구조분야 석탑엔지니어링 김용진

- 도로분야 ㈜동일기술공사 한상주

- 건축분야 도시기반시설본부 도시철도건축부장 이병석

- 시공분야(타일) 대림산업 조민행

- 경관분야 (재)한국색채연구소 최경인

- 시공감독(시설관리공단) 및 시공사

	Ⅳ	자문회의 결과

○ 보수·보강 공법 및 미관 검토

- BOX구간 : 기존 구조물 발견된 누수 부위 등 완전보수 후 몰탈 및 블록상태가      양호하므로 기존타일 제거 후 타일 부착

- U-Type구간 : 기존 구조물 누수, 백태 등 완전보수 후 BOX구간과 일체감을 주고 선형을 유지하기 위해 조적블록을 쌓고 타일 시공

○ 시공관리 방안

- 향후 타일 재탈락의 우려를 없애기 위하여 개량 압착공법 적용

- 신축(시공)이음부와 일정간격(9m) 이내 신축줄눈 설치 철저

- 자기질 타일 배면 요철이 큰 것 사용

- Open Time 시간 준수(바람으로 인한 몰탈건조시간 단축)

- 기존 구조물 본체구간 균열,누수,백태 등 완전 보수후 타일 붙임 시공

- 바탕면의 평활도 및 이물질 제거후 시공

	Ⅴ	조 치 사 항

○ 자문회의 검토 결과에 따라 천호지하차도 보수공사 추진

- BOX구간 타일제거후 타일 부착, U-Type구간 조적블록을 쌓고 타일 시공

○ 상기 사항을 시설관리공단에 통보하여 시행토록 하고 향후 설계변경 시행

○ 현장점검후 자문의견 제출 및 회의 참석한 외부자문위원에게 자문수당 지급

- 자문위원 7인 × 20만원 = 140만원

붙  임 : 1. 자문회의 참석 명단 1부.

2. 자문회의 검토의견서 1부.

3. 분야별 전문가 의견서 1부

4. 자문회의 및 현장점검 사진 1부.  끝.