문서번호	토목부-15796
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
박천용		최광무	08/14 代김영수
협조

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

조경 블럭 설치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시기반시설본부

(토 목 부)

- 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 -

조경블럭 설치 검토 보고

서부트럭터미널앞 지하차도건설공사 추진중 남분순환로 654 앞 조경블럭 설치 실정보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

□ 관련근거

○ 조경블록 설치 실정보고[서지(감) 제14-378호(‘14.08.11.)]

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도건설공사

○ 공사규모 : 도로구조개선 L=1.35Km

지하차도 L=1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

○ 공사기간 : 2008.03.10 ∼ 2014.08.29.

○ 공 사 비 : 820억원(공사비 772, 기타 48)

○ 시 공 사 : 중앙건설(주)외 1개사

□ 감리단 검토 의견

○ 검토내용

- 현 황

∙ 2009년 10월~11월 도로확장을 위한 Set Back 작업을 시행하면서 남부순환로 654번지(진덕산업) 앞 보도와 이면도로 보도 접속부에 단차가 발생하여 임시 무근콘크리트 옹벽을 설치(무대)하였으나,

∙ 민원인(진덕산업)이 기존옹벽과 단차가 발생하고 미관을 저해하므로 임시옹벽 철거후, 옹벽 재설치 요구 함.

- 신설옹벽(조경블럭) 설치 현황(H=1.8m ~ 0.6m, L=12.5m)

∙ 평 면 도 (STA.0+580)

∙ 조경블럭 상세도

※ 조경블럭 선정 사유( 컨츄리매너 블럭 )

▹건츄리매너 블럭은, 다양한 형태의 구조로 시공이 가능하며 시공기간이 짧아 공정관리에 유리하고, 당현장에 기시공 되어있는 컨츄리매너 블록과의 통일성을 위하여 건츄리매너 블록 공법을 선정함.

-  공사비 증감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증,(감)	비 고
직접공사비	식	-	5,265,131	5,265,131
제 경 비		-	935,779	935,779
물가변동액		-	51,818	51,818
공 급 가 액		-	6,252,728	6,252,728
부가가치세		-	625,272	625,272
도 급 액		-	6,878,000	6,878,000
폐기물처리비		-	307,000	307,000
총 공 사 비		-	7,185,000	7,185,000

○ 감리단 검토의견

- 위 와 같이 검토한결과 진덕산업앞 보도와 본선도로 보도구간의 단차가 발생하여 임시옹벽을 설치(무대) 하였으나, 민원인(진덕산업)이 임시옹벽 철거후 옹벽   재설치 요구를 하였으므로,

- 미관과 시공성에 유리한 조경블럭을 설치하여 민원을 해결하는것이 타당하다고  사료되오며, 실정보고 승인후 설계변경시 반영하고자 함

□ 공사시행 협의

○ 우리시 : 신규비목 낙찰율 70.849% 적용.

○ 도급자 : 신규비목은 자재비의 비중이 큰 부분으로서 공사시행에 어려움이 많아 설계가의 100% 적용

□ 조치계획

○ 상기 감리원 검토의견과 같이 승인하고 설계변경시 반영토록 업무지시 하고자 함.

○ 금회 실정보고건은 공사 시행 협의 하였으나 협의 되지않아 신규공종에 대해 공사계약일반조건 제20조 2항에 따라 강제 협의율 85.424% 적용코자 함.

붙 임 : 1. 감리원 실정보고 1부.  끝.