문서번호	시설관리과-18549
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
서규석	김대성	08/14 조상덕
협 조

설계변경 보고서

(2014년 남부 관내 긴급누수복구공사)

2014. 6

남부수도사업소

설계변경 보고서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 남부 관내 상수도 긴급누수복구공사(장기계속)

나. 계 약 자 : ㈜해정글로벌 류춘석, 대정건설(주) 오연석

다. 공사개요 : 누수복구 1,800건, 불용관 180건

라. 계약금액 : 2,750,331,000원

마. 공사기간 : 2014. 6. 21 ~ 2015. 6. 30

2. 주요 설계변경 사유 및 내역 보고

작업지시 및 현장여건 변화에 따른 신규공종 발생 및 계약물량 조정에 따른 설계변경 사항이 발생하였음을 보고함

- 신규공종 : 아스팔트깨기, 굴삭기0.4㎥, 누수외 251개 공종

▸ 단가적용 : 설계단가에 낙찰율 적용(86.7%)

- 물량감소(조정) : 아스팔트 포장절단, 누수외 301개 공종

- 변경내역(도급비)

당 초	변 경	증 ․ 감
2,750,331,000원	2,750,331,000원	없음

3. 조치의견

본부 계약심사과-227(2009.1.20)호 『09년 소규모 상수도공사 설계심사 추진계획』에 의거 계약금액 변경없어 자체 심의사항으로 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의한 후 그 결과에 따라 설계변경 시행코자합니다.

첨부 :  1. 제비율 검증 내역서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.