문서번호	시설관리과-21932
결재일자	2014.8.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	중부수도사업소장
서영인	한상근	나태산	08/14 안운길

굴착통제에 따른 공사구간변경 시행계획 보고

(성북동 131-85외 1개소 세척갱생관 정비공사)

2014. 08

중부수도사업소

시 설 관 리 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

굴착통제에 따른 공사구간변경 시행계획 보고

현재 시행중인 『성북동 131-85외 1개소 세척갱생관정비공사』 구간중 일부구간이  굴착통제구간(4구간, L=200m)임을 통보받고 그에 따른 조치계획을 보고함.

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 성북동 131-85외 1개소 세척갱생관정비공사

나. 공사기간 : 2014. 04 17 ~ 2014. 10. 12

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : 6개구간(D=150mm, L=1,200m)

마. 도 급 자 : ***************

바. 감독부서 : 서울특별시 시설관리공단 상수도공사관리처

2. 보고내용

구간	공사위치	설계연장(m)	부설연장(m)	진행율(%)	비고
	계	1,200	970	80.8
1	*********************	***	***	***
2	********************	***	***	**	*******
3	***********************	***	***	***
4	*************************	***	*	*	******
5	*************************	***	***	***
6	****************	***	***	***

3. 문제점

가. 도로허가부서(성북구청 도로시설과)로부터 *******************************에 대하여 도로굴착 통제 구간임을 통보받음.

※ 관련공문 : 2014년 성북구 도로관리심의회 개최 결과 통보[도로시설과-4230(2014.03.06.)]

나. 공사가능시기를 해당부서와 조율하였으나 2015.01월 이후 굴착가능해지므로 본 공사계약기간내에는 작업 불가한 실정임.

4. 조치의견

가. 본 공사건의 굴착이 불가한 4구간에 대하여는 누수복구 공사시 기 발견된 세척갱생관(CIP관) 매설구간에 대하여 구간 변경하여 정비함으로써 주민급수에 만전을 기하고자 하며,

- 변경구간

· 위     치 : ****************

· 기존관현황 : *************************

· 정 비 계 획 : D=150mm, L=100m

나. 금회 도로굴착 통제로 미정비된 4구간에 대하여는 굴착허가 가능한 기간에 정비코자 함.

붙임 : 1. 도로굴착통제 관련근거 1부.

2. 기존 공사구간 위치도 1부.

3. 변경구간 위치도 1부.  끝.