투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	성동구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	민원사항 조치결과 회신

1. 안전치수과-16692(2014.08.05.)호와 관련입니다

2. 「제4차 찾아가는 현장구청장실(2014.7.25.)」민원과 관련한 우리센터 조치사항을 아래와 같이 보내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

민 원 내 용	조 치 사 항
1) 중랑물재생센터 내 벌목을 막아줬으면 좋겠음	해당지역 벌목경위 ①‘14.4.30 7시경 강풍으로 인해 미루나무 1주가 전도되어 ㈜예스코의 시설물에 손상을 가하게 됨(첨부사진 참조) ② 미루나무의 특성상 뿌리가 약하고 바람에 쉽게 쓰러질 우려 가 있어 향후 태풍발생시 추가 전도사고로 주변의 인명 및 재산상 피해가 발생할 우려가 있어“위험수목 제거공사” 를 긴급발주하여 나머지 9주를 벌목하였음 ③ 센터내 미루나무가 높이 20~25m, 직경 45~60㎝의 거대수목인 관계로 작업공간 및 장비진입로 확보를 위해 부득이하게 주변 잡목까지 모두 제거하게 됨 향후 추가 벌목계획 : 없 음
3) 중랑물재생센터 내 공사 진행사항(단계별 추진 내용) 회신요청	공정율 : ‘14.8.13 현재 63.9% 향후계획 o ‘14.08 ~ ’15.11 ㆍ토목분야 : 생물여과막 질산화조, 초기우수처리시설 및 총인시설 구조물공사 ㆍ설비분야 : 기계, 전기 설비공사 ㆍ건축분야 : 하수도과학관 시설공사 ※ 9차 공사 진행 중(‘15. 2월 준공) o ‘15.12 ~ ‘16.03 ㆍ조경분야 : 수목식재 및 체육시설공사 ㆍ시설현대화 부분 종합시운전(예정) o ‘16.07 : 공사 준공(예정)

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	강신영		물재생과장	전결 08/14 강병수
협조자
시행	물재생과-3946	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 중랑물재생센터 본관3층 물재생과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/	godzero@seoul.go.kr	/	대시민공개