투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계용역 계약변경 시행 및 계약의뢰(2014년 운현궁 문화재 보수공사 )

우리본부에서 시행 중인 『2014년 운현궁 문화재 보수공사 설계용역』과 관련하여 아래와 같이 계약변경 시행 및 계약의뢰 하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 사업개요
가. 용 역 명 : 2014년 운현궁 문화재 보수공사 설계용역
나. 계 약 자 : ㈜ 한인건축사사무소  유상진
다. 계약금액 : 19,957,000원
라. 계약기간 : ‘14.05.19 ~ ’14.08.16

2. 계약변경내용

변 경 전		변 경 후		비 고
기 간	금 액(원)	기 간	금 액(원)
‘14.05.19~’14.08.16	19,957,000	‘14.05.19~’14.09.15	좌 동	증) 30일

가. 연기사유 : 2014년 서울 운현궁 문화재 국고보조 사업지침 변경에 따른 행정처리기간 연장
나. 귀책소재 : 우리본부

붙 임  1. 준공기한 연장 검토 보고서 1부.
2. 준공기한연기의뢰서 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김현지		문화시설과장	정진수		건축부장	08/14 김우성
협조자
시행	건축부-10023	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개