문서번호	방재시설부-7674
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
한종수		서관석	08/14 임춘근
협조

「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」

준공기한 연기 검토 보고(총차,2차,3차)

2014. 8.

서울특별시도시기반시설본부

(방재시설부)

『합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」

준공기한 연기 검토 보고(총차,2차,3차)

○ 우리 본부에서 시행중인 「합정외1개소 빗물펌프장 증설공사」의 중동빗물펌프장 부지내 지장수목 이식지연, 복공판 추가설치 및 합정빗물펌프장 부지내 지장물 수용지연으로 절대공기가 부족하여 준공기한을 연기코자 함

1		관련근거

□ 공사감독1처-7212호(‘14.8.11) : 준공기한 연기신청(총차분,2차분,3차분)에 대한 검토보고서 제출

□ 하천관리과-12730호(‘14.8.7) : 합정빗물펌프장 수용재결 결과 알림(수용개시일 2014.9.10.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정펌프장, 중동펌프장)

□ 공사기간 : ‘13. 1. 4 ~ '14. 9. 3

□ 도 급 비 : 4,740백만원(2차 970백만원, 3차 1,280백만원)

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

3		추진경위

□ 2013.  1.  4 : 공사 착공

□ 2013.  8. 27 : 가시설(Sheet Pile) 착수

□ 2013. 10. 23 : 복공판 설치(12.8 설치 완료, 실 시공일 33일)

□ 2014.  7. 12 : 저류조 슬라브콘크리크 타설(토목구조물 완료)

□ 2014.  8. 14 : 3층 바닥콘크리트 타설

4		공단 검토 내용

□ 현 황

- 중동빗물펌프장 지장수목 이식지연 및 공사장 부지 협소로 복공판 설치에 따른 준공기한 연기(1차공사)되어 후속공종인 2차공사의 절대공기가 부족하며,

- 합정빗물펌프장 지장건물이 수용(수용개시 : 2014. 9. 10)되어, 건물철거 후 공사착수 시 절대공기(설계시 20개월 산정)가 부족하여 총차 및 3차공사 준공기한 연기가 필요 함.

□ 준공기한 변경(연장) 내용

구분	당 초	변 경	비 고
총 차	2013. 1. 4 ~ 2014. 9. 3	2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30	증 605일
2 차	2013. 12. 27 ~ 2014. 8. 31	2013. 12. 27 ~ 2014. 12. 20	증 111일
3 차	2013. 4. 1 ~ 2014. 8. 30	2013. 4. 1 ~ 2015. 5. 30	증 273일

□ 공단감독 검토의견

- 중동빗물펌프장 1차공사 연기에 따른 후속공종(2차공사) 연기로 111일은 적정하며,

(1차분 연기일수 96일 + 실 복공철거기간 19일 – 동절기 보양기간 4일 = 111일)

- 합정빗물펌프장의 지장건물이 2014. 9. 10 수용개시되어 건물철거 후 설계시 공사 기간으로 산정한 20개월이 필요 할 것으로 판단되므로 준공기한 605일(총차) 및 273일(3차) 연기는 적정 함.

5		조치의견

□ 상기 공단 검토내용과 같이 준공기한 연기는 적정하다고 판단되는 바, 계약부서에 연기 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 공단 검토보고서 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 준공기한 연기의뢰서 1부.   끝