문서번호	현장민원과-18451
결재일자	2014.8.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		현장민원과장
박처규		08/14 박길영
협 조

2014년 상반기

노후 옥내급수관 추진실적 분석

2014. 07.

현장민원과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

노후 옥내급수관 추진실적 분석

2014년 주요사업(BSC사업)으로 추진하고 있는 노후 옥내급수관 상반기 추진실적을 분석하여 금년도 목표달성에 만전을 기하고자 함

□ 추진계획(BSC사업)

○ 2014년 계획목표 : 2,000가구(공용배관 1,400, 세대배관 600)

○ 지원예산 : 790백만원

- 분기별 추진계획

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계획목표(가구)	2,000	200	600	600	600
예산(백만원)	790	79	237	237	237

□  추진실적(2014.6.30. 현재)

○ 공사비지원 실적

- 총 1,752가구(87.6%)

• 공용배관 교체 : 1,354가구

• 세대배관 교체 : 398가구

- 분기별 추진실적

구 분	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
교체가구	1,752	154	1,598	-	-
집행액(백만원)	392	74	318	-	-

※ 구산동 경향파크아파트 공용배관 교체 중으로 8월 중 완료예정 : 171세대

○ 홍보 및 추진사항

- 2014년 노후 옥내 공용배관 교체 중점 추진계획 시달 : 01.29

- 노후 옥내 공용배관 교체 중점 추진계획 수립 : 02.10

- 공사비지원 홍보전단지 인쇄(30,000매) : 02.15

- 관내 설비업체(327개 업체) 홍보물 배부 : 03.12

- 수질검사원 활용 홍보요청 : 03.17

- 고도정수처리공급지역내 집중 홍보물 배부 : 04.01.~04.30

• 응암1동외 8개동(9개동) : 4,172가구(단독 1,586, 공동 2,586)

- 노후 아파트(구산동 경향파크, 홍제동 고은) 방문 홍보 : 05.08.~05.15

- 관내(마포구,서대문구,은평구) 주민센터 홍보물 배부 : 06.16

□ 향후 전망 및 추진계획

○ 금년도 우리사업소 공사비지원 목표는 2,000가구로 2014.6.30. 현재 1,752가구를 지원하여 87.6% 실적을 달성하고 있어 계획목표 초과달성이 예상됨

○ 공용배관교체 추가 신청이 예상되는 서대문구 청구1차아파트(862

세대) 및 연희동 한양아파트(600세대)는 지속적으로 독려

○ 세대배관교체 활성화를 위해 관내 공인중개업체(1,020개)에 건물

매매 및 전,월세 계약 시 노후 배관은 교체 후 입주토록 홍보물

발송 : 2014.8월

○ 2015년 공용배관 교체예정 아파트 주민설명회 등 집중 독려

- 홍은 서강2차(73가구), 홍은 벽산(1,509가구), 신사 미성(570가구).

끝.