투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	현장 실정(쉬트파일 사장)보고 조건부 승인 통보

1. 공사감독1처-7072호(2014. 8. 6)와 관련입니다.

2. 우리본부 시설공사인 「염창2외 1개소 빗물펌프장 증설공사」의 현장 실정(쉬트파일 사장) 보고건에 대해 조건부 승인 통보하니 후속 조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 조건부 승인 내용.

1) 쉬트파일 사장에 대한 사유는 적정하므로 승인처리하나 단가에 대한 이견이 있으므로 우리본부 설계변경소위원회 의견을 듣고 그 결과에 따라 처리하고자 함.

2) 쉬트파일 수량 누락건에 대해서는 도면과 내역서를 검토한 결과 쉬트파일의 총 수량은 176본(안양천 진입로 86본, 본구조물 90본)으로 누락된 내용이 없으므로 재검토 해 보시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	조동협		방재시설과장	서관석		방재시설부장	08/14 임춘근
협조자
시행	방재시설부-7672	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/
전화	02-3708-8774	/전송	02-3708-8756	/		/	대시민공개