투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산)시행(북악스카이웨이1교 긴급보수공사 - 슬래브 단면보수)

1. 시설보수과 – 5907(2014. 8. 13)호와 관련입니다.

2. 북악스카이웨이1교 긴급보수공사(슬래브 단면보수)에 대한 설계변경(정산)을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 북악스카이웨이1교 긴급보수공사(슬래브 단면보수)

나. 공사기간 : 2014. 6. 30 ~ 2014. 8. 28

다. 공사개요 : 슬래브 단면보수 100㎡, 신축이음보수 40m, 등

라. 계 약 자 : ㈜씨타유진아이디  대표 윤진환

마. 변경사유 : 물량 증․감 및 정산

바. 변경내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비 고
총 공 사 비		110,828,700	107,580,000	(감)3,248,700
도 급 비	공급가액	99,056,091	97,800,000	(감)1,256,091
	부 가 세	9,905,609	9,780,000	(감)125,609
	계	108,961,700	107,580,000	(감)1,381,700
관 급 비		1,867,000	0	(감)1,867,000

사. 예산과목 : 도시안전실도로시설과,도로시설관리,도로시설물운영(일),북악스카이웨이1교 긴급보수공사,시설비

첨  부 : 설계변경 관련서류 1부. 끝.

★주무관	김영원		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	08/18 이승진
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-5980	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번2동(보건소길 2 ) 365-1	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5451	/전송	02-945-5073	/	ywk2601@seoul.go.kr	/	대시민공개