문서번호	행정지원과-12925
결재일자	2014.8.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
강혜성	이우재	장성만		08/18 원응연
협 조

「문정동지점」

수질자동측정기 이전 설치완료 보고

2014. 08

강동수도사업소

《행정지원과》

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「문정동지점」 수질자동측정기 이전 설치완료 보고

광암수계 관말인 문정동의 수질변화를 실시간으로 감시하기 위해 송파소방서에 설치한 수질자동측정기 문덕초등학교로 이전하고 그 결과를  보고드림

추진근거 : 마천동지점의 수질자동측정기 이전 계획

(행정지원과-10225,2014.7.1.)

추진개요

수질측정기 이전 사유

- 2014.5.11.~5.13. 문정동 87번지일대 고탁도 발생으로 인한 실시간 수질모니터링 필요

- 현재 마천동(송파소방서)에 설치되어 있는 수질측정기는 거마가압장과 불과 500m거리에 위치

→ 두 지점 모두 광암 직송수계로 탁도측정값 차이 없음

- 따라서, 마천동(송파소방서)에 설치된 측정기를 문정동(문덕초교)으로 이전설치하여 수질감시 강화

수질측정기 기존 설치 지점 :  송파구 마천동 29-1(송파소방서 내)

실행내용

2014.08.02. 문덕초교내 상하수도배관 설치

2014.08.04.~08.05 문덕초교내 수질측정기설치 기초 공사실시

2014.08.07. 송파소방서에 설치된 수질측정기 분리작업 및 인입선 폐쇄- 송파소방서에 설치된 수질측정기 철거 및 인입선 폐쇄

- 문덕초교로 수질측정기 설치 및 전기, 전용회선 설치 완료

2014.08.08. 수질측정기 시운전 후 정상가동완료

2014.08.09. 도로 및 학교내 인도 굴착지점 포장완료

기대효과

위례신도시 및 동남권일대 다량급수처의 급수변화로 인한 수질변화 사전감시 가능

마천동지점의 측정기 이전으로 측정기 신설에 따른 비용 감축.

붙임 : 수질측정기 이전설치 사진대장 1부.  끝.