문서번호	건축부-10054
결재일자	2014.8.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이형재		조영수	08/18 김우성
협 조

「구로 50+ 캠퍼스 건립공사」

기본설계 VE 이행회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

도시기반시설본부

(건축부)

「구로 50+ 캠퍼스 건립공사」

기본설계 VE 이행회의 결과보고

『구로 50+ 캠퍼스 건립공사』추진과 관련 설계의 경제성 검토를 위한 기본설계 VE 이행회의 개최 결과 보고임

□ 기본설계 VE 워크샵 개최

○ 일    시 : 2014.08.12.(화) 14:00~17:00

○ 장    소 : 도시기반시설본부 3층 대회의실

○ 안    건 : 구로 50+ 캠퍼스 건립공사 기본설계 VE 이행회의

- 기본설계 VE 워크샵에서 제안된 아이디어 채택여부 결정

○ 참 석 자

- 외부 TF 위원 : 서울기술사학원 원장 조민수 외 8명

- 도시기반시설본부 : 복지시설과장 외 3명

- 설 계 자 : 박용채 이사 외 각 분야 설계자 6명

□ 진행내용

○ 각 분야별 아이디어 제안 설명

○ 제안의 채택여부 결정(설계자 질의응답)

○ 추가 아이디어 도출

□ 기본설계VE 이행회의 결과

○ 설계 VE 아이디어 제안

구분	건축 계획	건축 시공	건축 구조	토목	기계 (소방포함)	전기	계
아이디어	4건	5건	6건	4건	7건	5건	32건
설계보완	5건	3건	9건	5건	3건	3건	27건

○ 이행회의 결과 분야별 반영건수

아이디어	반영 여부				설계보완	합계
	반영	재검토	미반영	소계
계 획	2	1	1	4	6	10
시 공	1	1	3	5	3	8
구 조	3	3	-	6	9	15
토 목	1	2	1	4	5	9
기 계	7	-	-	7	3	10
전 기	5	-	1	5	3	8
합 계	19	7	6	32	28	60

□ 처리의견

○ 기본설계 VE 이행회의 결과를 설계용역자(디엔비건축)에게 통보하여  기본설계에 반영코자 함.

□ 향후 계획

○ 2014. 08. : 기본설계 VE 보고서 작성

○ 2014. 09. : 설계 보완 및 실시설계

○ 2014. 10. : 건설기술심의(설계심의) 및 실시설계VE

○ 2014. 11. : 설계용역 준공 및 공사발주

붙임  1. 기본설계 VE 이행회의 결과보고 1부.

2. 설계VE 외부 전문가위원 참석자 명단 1부.

3. 기본설계 VE 이행회의 사진 1부.  끝.