투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	신월지하차도 평면화 전기공사 설계변경 및 공사기간 연기 시행에 따른 계약 요청

1. 우리 본부에서 시행중인 「신월지하차도 평면화 전기공사」에 대하여 설계변경 및 공사기간 연기 사항이 발생하여 아래와 같이 계약 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신월지하차도 평면화 전기공사

나. 공사기간 : 2014.01.02 ~ 2014.08.29

다. 계 약 자 : (주)남일기업 대표 이범석

라. 계약금액 : 금144,972,134원

마. 설계변경내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증․감	비 고
계약금액	144,972,134원	169,620,000원	증)24,647,866원	-계약금액 증액

※ 설계변경 사유 : 사업계획 변경(저류조 설치) 및 교통신호기 원인자부담공사 처리

바. 공사기간 연기내용

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
공사 기간	2014.01.02~2014.08.29	2014.01.02.~2014.09.29	증)30일	-귀책소재 : 발주처 -지체상금 부과여부 : 미부과

※ 공사기간 연기사유 : 사업계획 변경(저류조 설치) 및 교통신호기 설치 시기 미도래에 따른                                     절대공기 부족

사. 예산과목 : 도시안전실 도로계획과, 도로건설, 간선도로망확충, 신월지하차도 평면화, 시설비 및 부대비, 시설비-사고이월

따로붙임 : 1. 설계변경 및 공사긴간 연기 검토 보고서 1부

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부. 끝

	설비부장
주무관	김두환		환경설비과장	이달영		설비부장	08/18 박기형
협조자
시행	설비부-9083	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동(2층) 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	대시민공개