투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시 서부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연기 협조요청

1. 서부도로사업소 기전과-3831(2014.4.22.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진중인 「신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사」와 관련 ‘교통안전시설물 원인자 부담공사’의 승인기한을 아래와 같이 연장 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 신촌·마포로 중앙차로 및 교통구조개선 전기공사

나. 공사내용 : 교통안전시설물(신호등) 설치공사

다. 공사장소 : 이대역(서대문구,마포구) ~ 서대문역(서대문구)

라. 원 인 자 : 서울특별시 도시기반시설본부

마. 시 공 사 : 우남전설주)

바. 공사기간 변경내용

- 당  초 : 2014.04.22 ~ 2014.07.31

- 변  경 : 2014.04.22 ~ 2014.10.31

사. 연기사유 : 토목공사 지연에 따른 공기부족. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김홍석		시책사업과장	이흥복		설비부장	08/18 박기형
협조자
시행	설비부-9079	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관 2동 2층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8646	/전송	3708-8659	/	khs25@seoul.go.kr	/	대시민공개