함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 심의위원회 개최(상계8동파출소~농협마들역지점간 송배수관 정비공사)

1. 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-13152(2014.08.12.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행하고 시설관리공단에서 감독중인 송배수관 정비공사에 대하여 아래와 같이 설계변경 심의회를 개최하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 상계8동파출소~농협마들역지점간 송배수관 정비공사

나. 공사기간 : 2014. 5. 26. ~ 2014. 10. 2.

다. 도 급 액 : 156,944,000원

라. 공사개요 : D=100~400mm, L=560m

마. 도 급 자 : 토상토건(주) 대표 홍승권

바. 감 독 자 : 시설관리공단 공사감독2처 이진용

사. 설계변경 사유  - 신규공정 발생에 따른 변경
- 기타 현장여건에 따른 물량변경

아. 변경내용

구 분	송수관	배급수관
당 초	D=400mm, L=509m	D=100~250mm, L=51m
변 경	D=400mm L=492.3m	D=25~250mm, L=93.8m

자. 공사비 변경

구 분	금 액		증,감
	당 초	변 경
총 공사비	292,502,700	288,480,300	-4,022,400
도 급 비	156,944,400	152,922,000	-4,022,400
관급자재비	135,558,300	135,558,300	0

차. 심의회 개최

- 심의일정 : 2014. 08. 19.(10:00)

- 장    소 : 급수운영과

- 심의위원 : 위원장 급수운영과장

위 원 : 시설7급 김종필, 시설7급 강대유

시설7급 유광창, 시설7급 이한수

- 심의내용 : 신규공종, 계약물량 증감에 따른 설계변경 적정 여부

기타 제반규정 적정준수여부.

붙 임 : 1.설계변경 보고서 공문 1부.

2.설계변경 내역서 1부.

3.설계변경 심의요구서 및 사유서 1부. 끝.

주무관	정기성		주무관	이승완		급수운영과장	08/18 김수영
협조자
시행	급수운영과-15703	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3367	/전송	02)3146-3389	/		/	대시민공개