함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 사업소 의견 통보(성북1배수지 급수환경 취약관망 이중화공사)

1. 공사감독2처-13417(2014.08.18)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중인 『성북1배수지 급수환경 취약관망 이중화공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 공사감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아       래 -

연번	공단보고내용 및 검토의견	사업소 검토의견	비고
1	- 당초공사 부지는 인접한 성북구 관내 부지를 확보토록 설계되었으나, 실제 시공사 사용부지 면적을 산정하여 부지임대료를 적용코자 함. - 부지면적(64㎡)을 반영하면 산출금액(3,533천원)이 계약금액(3,336천원)보다 크므로 계약금액으로 적용하여 반영코자 함.	- 부지변경에 따른 부지임대료는 상수도설계 일반방침에 의거 실제 점유(사용)한 면적을 기초로 산출됨에 따라 공단의견대로 반영할 것 - 변경 사항은 추후 설계변경 시 반영토록 할 것.

끝.

	중부수도사업소장
주무관	이연한		주무관	한상근		시설관리과장	08/18 나태산
협조자
시행	시설관리과-22154	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장충동2가 208-1 3층 시설관리과	/
전화	02-3146-2205	/전송	02-3146-2239	/	wakeup73@seoul.go.kr	/	대시민공개