투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서울과학관건립공사 책임감리원 귀하
(경유)
제 목	석면철거 및 처리에 대한 실정보고 승인 알림

1. 정과감 제14-33호와 관련입니다.

2. 서울과학관 건립공사와 관련 철거건축물에 대한 석면철거 및 처리에 따른 실정보고는 철거건축물의 석면사전조사비 외에 철거 및 폐기물 등 처리비를 내역에 추가 반영하는 것으로서 귀하의 실정보고를 승인하니 설계변경 조치하시기 바랍니다.

○ 공사비 증감                                           (단위 : 원)

구분	당초	변경	증감	비고
석면철거공사	1,109,947	6,499,947	증 5,390,000

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
지방시설사무관대우	윤승근		환경시설과장	신명승		건축부장	08/18 김우성
협조자
시행	건축부-10074	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울 중구 덕수궁길15 서문별관2동 2층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2474	/전송	3708-2489	/		/	대시민공개