시 행	설비부-9060
시행일자
수 신 자	내부결재

결재	주무관	건축설비과장	설비부장
	배수웅	조예환	08/18 박기형

설계변경 자문회의(소위원회) 심의결과(제7차)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

문서요청번호			설비부-8571호				요청부서		열빛총괄과		심의일자		2014.08.14
공 사 명			장충체육관 리모델링 통신공사
공 사 개 요			공사규모				- 건축 연면적 11,429㎡(지하2층 지상3층, 문화 및 집회시설) - 통합배선설비 등 1식
			공사기간				2012.07.04. ~ 2014. 12.31.
			감 리 사				펨코엔지니어링
			설 계 사				화용이엔씨
			시 공 사				(주)디투엔지니어링
심의요청사유							∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사유> ○ 옥외 공사구간 암반 및 지열공사 통합배선설비 및 CATV 인입경로 변경 ○ 서울메트로 요청에 의한 CCTV 추가 반영 ○ 케이블트레이 규격 변경(사다리형→펀치형) ○ 사업계획 변경 방침에 의한 비상벨 및 무선랜 반영 등 <설계변경 금액> 총차 : 533,685천원 → 668,456천원(증 134,771천원)
원설계자 의견
심의결과		조건부			붙임 심의위원 지적사항 보완 조건
심의결과 조치					· 심의위원 지적사항을 보완하여 설계에 반영 조치
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위원장			김창균				간 사		배수웅
	위 원			김두환				위 원		이동기
	위 원			이재홍				위 원		김홍석