문서번호	경제정책과-9642
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	산업기반팀장	경제정책과장
이종권	김국진	08/19 이해우
협 조
	계약2팀장		홍연화

『서울과학관 건립부지 내』

분묘 처리용역 계약변경 검토 보고

2014. 8

경제진흥실

(경제정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『서울과학관 건립부지 내』

분묘 처리용역 계약변경 검토 보고

서울과학관 건립부지내 무연고 분묘 처리용역 추진중 추가 분묘 발견에 따라 분묘처리 용역에 대한 계약변경을 추진코자 함.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 서울과학관 건립부지 내 분묘처리 용역

❍ 계약기간 : 2014.4.15.~2014.8.29

❍ 계약업체 : ㈜ 건국공영 대표 문일현

❍ 계약금액 : 9,923천원

□ 추진경위

❍ ’14.4.15. : 분묘처리 용역계약

❍ ’14.4.10. : 분묘개장 공고(1차) ※ ’14.4.10~’14.7.11

❍ ’14.5.15. : 분묘개장 공고(2차)

❍ ’14.7.21. : 분묘개장 허가(노원구청장)

❍ ’14.7.28. : 분묘개장 개장 및 처리완료

□ 변경사유 및 검토결과

❍ 변경사유 : 분묘개장 공고기간 및 개장작업중 추가 분묘 발견

- 지하층 터파기 및 주변정리 작업중 추가발견(2기)

- 분묘개장 작업중 합장 분묘 발견(3기)

❍ 검토의견

- 과학관 건립공사 터파기 및 개장 작업중 예상치 못한 발견 분묘로서추가 발견 분묘에 대하여 계약변경 처리함이 타당함

※ 추가 분묘(2기) 계약단가, 합장분묘(3기) 계약단가의 50%

□ 변경내용

❍ 변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
분묘기수	11기	16	※ 추가발견 2기 합장 3기
용역기간	’14.4.15~’14.8.29	변경없음
계약금액	9,923천원	13,080천원	증)3,157천원

❍ 예산과목  : 경제정책과, 활력이넘치는 경제환경 구축, 기업활동지원체계구축, 서울과학관건립, 시설부대비(401-03)

□ 처리계획

❍ 상기 검토 의견과 같이 추가 발견 분묘에 대하여 계약변경 처리코자 함

- 분묘처리 용역 계약변경 처리 : ’14. 8월중

- 분묘처리 용역 준공처리      : ’14. 8월 29일한

별첨 : 1. 변경내역서

2. 분묘개장 완료 및 대금청구서. 끝.