투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시장(도로계획과장)
(경유)
제목	기본 및 실시설계용역 연기사항 알림

1. 우리본부에서 시행중인 「디지털3단지~두산길간 지하차도 설치 기본 및 실시설계용역」외 2건에 대하여 아래와 같이 용역기간을 연기조치하였음을 알려 드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.용역기간 연장내용

용 역 명		광복교~안양교 주변 도로확장 기본 및 실시설계	디지털3단지~두산길간 지하차도설치 기본 및 실시설계	도시고속도로 연결램프 (화랑로 진출입)설치 실시설계용역
계약금액		947,334,000원	768,933,000원	547,000,000원
용역업체		㈜경동엔지니어링외 2	㈜유신외 2	㈜선진엔지니어링외 2
용역 기간	당초	2012. 6. 5. ~ 2014. 8.30.	2013. 5.23. ~ 2014. 8.30.	2012.12.28. ~ 2014. 8.31.
	변경	2012. 6. 5. ~ 2014.11.30.	2013. 5.23. ~ 2014.10.31.	2012.12.28. ~ 2014.12.31.
연기사유		- 안양교 형식변경에 따른 건설기술 재심의 - 자동차 전용도로 해제에 따른 설계기준변경 등	- 지하매설물(고지수로) 추가발견에 따른 시공 방안 재검토 - 관련기관 재 협의 등	- 진입램프 노선변경으로 기본 및 실시설계 재추진 진출램프 기본설계안 재 검토 및 신규노선안 검토

.끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	08/19 노우성
협조자
시행	토목부-15962	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개