투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	디지털3단지~두산길간 지하차도 기본 및 실시설계용역 과업기간 연기안내

1. 먼저, 의(위)원님들의 가정에 행복과 건강을 기원하오며, 주민숙원사업인 디지털3단지~두산길간 지하차도건설사업을 추진함에 있어 깊은 애정과 함께 지대한 관심 가져 주심에 감사드립니다.

2.「디지털3단지~두산길간 지하 차도설치 기본 및 실시 설계  용역」추진중 예상치 못한 지하매설물(고지수로 하수박스)이 추가로 확인되어 저촉되지 않는 범위내 지하차도 건설이 가능한 방안 재검토 및 이에 따른 관련기관 협의 등으로 용역기간 조정이 불가피함하여 부득이  아래와 같이 연기되었음을 알려드리오며, 향후 공사시행시 차질이 없도록 정밀하고 성실한 설계를 도모코자하오니 널리 양해하여 주시기 바라며, 앞으로도 지속적인 관심과 배려를 당부드립니다.

3. 끝으로, 의(위)원님의 가정에 항상 웃음과 행복이 가득하시기를 다시한번 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

가.용 역 명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도설치 기본 및 실시설계

나.용역업체 : ㈜유신외 2개사

다.용역기간(변경) : 2013. 5.23. ~ 2014.10.31.

라.문의처 : 도시기반시설본부 토목부 이석근 (☏02-3708-2588).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	채인묵 의원님 귀하(금천구 시흥대로 73길 70),류은무 의원님 귀하(금천구 시흥대로 73길 70),박용달 위원님 귀하(금천구 벚꽃길 73 금천현대아파트 110-1202호),강말임 위원님 귀하(금천구 벚꽃길 73 금천현대아파트 107-802호),김재산 위원님 귀하(금천구 범안로 1136 중앙하이츠빌 아파트 106-1203호),김은주 위원님 귀하(금천구 범안로 1136 중앙하이츠빌아파트 104-2103호),이인식 위원님 귀하(금천구 한내로 62 한신아파트 1동 206호),김용성 위원님 귀하(금천구 가산디지털로 88 IT프리미어타워 502호),주양숙 위원님 귀하(금천구 두산로 36 진도아파트 201동 408호),김현신 위원님 귀하(금천구 시흥대로 251 산호씨티빌 203호),송인직 위원님 귀하(금천구 벚꽃길 298 대률포스트타워 6차 230호)
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	08/19 노우성
협조자
시행	토목부-16043	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개