투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	디지털3단지~두산길간 지하차도건설 기본 및 실시설계용역기간 연기안내

1. 귀 댁내 행복과 건강을 기원하오며, 주민숙원사업인 디지털3단지~두산길간

지하차도건설사업을 추진함에 있어 지대한 관심과 협조하여 주심에 감사드립니다.

2.다름이 아니오라 현재 수행중인「디지털3단지~두산길간 지하 차도설치 기본 및 실시설계 용역」을 추진중 예상치 못한 지하매설물(고지수로 하수박스)이 추가로 확인되어 지하차도 시공방안 재검토 및 이에 따른 관련기관 협의 등으로 용역기간 연장이 불가피함에 따라   부득이 아래와 같이 연기하였음을 알려드리오니 두산길상 지하차도 건설에 따른 저촉 토지 및 건물주께서는 공장이전 시기 등 참고하시기 바랍니다.

3.향후 공사시행시 차질이 없도록 정밀하고 성실한 설계를 도모코자하오니 널리 양해하여 주시기 바라며, 앞으로도 지속적인 관심과 배려를 당부드리며, 끝으로 귀하의 가정에 항상 웃음과 행복이 가득하시길 다시한번 진심으로 기원합니다. 감사합니다.

가.용 역 명 : 디지털3단지~두산길간 지하차도설치 기본 및 실시설계

나.용역업체 : ㈜유신외 2개사

다.용역기간(변경) : 2013. 5.23 ~ 2014.10.31.

라.문의처 : 도시기반시설본부 토목부  이석근 (☏02-3708-2588).  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	문명건님 귀하(금천구 독산동 331-55),김학성님 귀하(광명시 하안동 702 고층주공아파트 518-1203호),김창한님 귀하(송파구 올림픽로4길 15 잠실동 아시아선수촌아파트 1동 1304호),정풍전산품주식회사 귀중(금천구 독산동 336-35),변재기님 귀하(금천구 두산로 5-29),미성인쇄주식회사 귀중(금천구 독산동 336-6),이상문님 귀하(마포구 함정동 371-10 701호),정양수외1님 귀하(종로구 숭인동 240-1),강종성외1님 귀하(구로구 구로중앙로 134 신구로자이나인스에비뉴 2501호),김웅기님 귀하(양천구 신정동 313 목동신시가지아파트 904-1201호),주식회사 에스더블유몰 귀중(금천구 독산동 998-2),최병두님 귀하(동작구 대방동 501 대림아파트 105-1403호),김철중님 귀하(강남구 압구정동 408 미성아파트 27-502호),양희봉님 귀하(용산구 이촌로 248 한강맨션 21동 302호),이규현외1님 귀하(구로구 구로동 394-80),손춘모님 귀하(관악구 신림동 1694 신림현대아파트 103-1502호),노승환님 귀하(화성시 송산면 고정리 464-2호),김병주외1님 귀하(영등포구 신길동 769-1 한성아파트 101-1601호),주식회사 이레산업 귀중(금ㅂ천구 가산동 448 대륭테크노타운3차 611호),백명수님 귀하(금천구 독산동 108),(주)한진드림익스프레스 귀중(금천구 독산동 333-1),(주)에스와이건설 귀중(전남 나주시 산포면 내기리 318),송용섭님 귀하(서초구 서초동 1146-11 현대슈퍼빌 에이-2705)
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	08/19 노우성
협조자
시행	토목부-16042	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개