함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약금액 조정 심의 의뢰(암사고도 정수설계변경)_전기

1.  우리 본부에서 시행중인 『암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사』와 관련 기 실정보고 승인사항에 대하여 계약심사 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사 업 명   : 암사정수장 현대화 및 고도정수처리건설 전기공사

나. 계약방법   : 장기계속 계약

다. 계약 상대자 : 육일전력(주) 대표 박 봉 기

라. 계약금액   : 6,068,657천원

마. 공사기한   : 2009. 10. 26. ~ 2014.10.30

바. 계약금액 조정 심의내용(총 금액 : 감액 377,066천원)

① 방호울타리 진동감지기 설치외 1건 → 증액 184,885천원

② 계측제어케이블 추가공사외 5건 → 감액 : 300,521천원

첨    부 : 1. 감리검토의견서 1부.

2. 관련 방침서 각1부.

3. 내역서(별도송부) 끝.

	기전설비과장
주무관	서기종		기전설비과장	08/19 서대훈
협조자
시행	기전설비과-5555	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개