문서번호	도로보수과-3787
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	도로보수과장
홍수종	08/19 국중진

작업완료(일부구간) 보고서(제4차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8

성동도로사업소

(도로보수과)

·

작업완료보고

□ 공사 일반현황

○ 공  사  명 : 2014년 관내포장도로굴착복구공사(연간단가계약)

○ 공 사 개 요 : 소규모 포장복구 : 52a, 절삭후덧씌우기 : 260a

○ 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2015. 2. 28

○ 착  공  일 : 2014. 3. 28

○ 준공예정일 : 2015. 2. 28

○ 도  급  자 : 한림토건  이현숙

○ 도 급 비 : 595,004,190원

□ 보고현황

【4차】

○ 4차 작업지시

- 작업지시일 : 2014. 5. 21

- 작업지시내용 : 장안동 301-2~316-1 앞외 5개소

(굴착복구A-1 : 50.25a, 차로단위복구 : 124.5a)

○ 작업완료구간 내용(4차)

- 작업완료일 : 2014. 8. 18

- 기 작업완료내용(2개소) : 답십리동 53-6~21-79외 1개소

(굴착복구A-1 : 17.24a, 차로단위복구 : 35.4a)

- 금회 작업완료내용(1개소) : 광나루로 398 ~ 천호대로 546

(굴착복구A-1 : 26.07a, 차로단위복구 : 59.74a)

- 진행중(3개소) : 장안동 301-2~316-1 앞외 2개소

(굴착복구A-1 : 25.78a, 차로단위복구 : 33.64a)

○ 작업현황

지시 번호	위 치	포장 종류	지시내용			완료내용			비고
			폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	폭 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)
4-1	장안동 301-2 ~ 316-1	A-1	1.2	420.0	504.0				진행중
		평삭(A-1)	3.0	420.0	1,260.0
4-2	답십리동 53-6 ~ 21-79	A-1	1.2	540.0	648.0	1.0~6.0	743.5	1,058.77	기보고
		평삭(A-1)	3.0	540.0	1,620.0	3.5~10.0	538.0	2,274.25
4-3	용두동 791 앞	A-1	1.2	240.0	288.0	1.2~4.2	380.3	665.59	기보고
		평삭(A-1)	3.0	240.0	720.0	2.3~8.0	311.2	1,265.65
4-4	군자동 463-10 ~ 화양동 21-6	A-1	1.25	1,450.0	1,812.5				진행중
		평삭(A-1)	3.0	1,450.0	4,350.0
4-5	광나루로 398 ~ 천호대로 546	A-1	1.2	1,282.0	1,538.4	1.3~1.2	1,628.1	2,607.83	금회
		평삭(A-1)	3.0	1,282.0	3,846.0	3.0~14.0	1,258.3	5,974.85
4-6	능동로 107 ~ 능동로 129	A-1	1.2	218.0	261.6				진행중
		평삭(A-1)	3.0	218.0	654.0
게					5,025.5 (12,450)			4,332.19 (9,514.75)

□ 조치사항

○ 위 내용과 같이 진행중인 공사(3개소)를 제외한 복구 완료된 구간에           대하여 추후 설계변경에 반영하여 준공처리 하고자 합니다.

붙임 : 작업완료보고서 1부. 끝.