함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(불광천~증산교간 송배수관정비)

1. 우리사업소에서 시행 중인『 불광천~증산교간 송배수관 정비공사』에

대하여 아래와같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 :『불광천~증산교간 송배수관정비공사』

나. 도 급 자 : 티비건설(주) 대표  이충관

다. 계약기간 : 2013.06.19. ~ 2014.09.05.

라. 예산과목 : 자본적지출, 가동설비자산, 구축물, 시설비(송배수관 정비)

마. 설계변경 주요 내역 : 신규공종 및 시공물량, 물가변동으로 인한 계약금액 증․감에 따른 변경

구 분	당 초	변 경	비 고
총 공 사 비	3,015,248,476원	2,953,142,660원	감)62,105,816
도 급 비	2,898,766,470원	2,894,265,000원	감) 4,501,470
관 급 자 재 비	116,482,006원	58,877,660원	감)57,604,346

바. 설계변경 금액 내역

첨부 : 1)설계변경 심의회 개최 및 결과 1부.

2)설계변경 내역서 1부.   끝.  추산번호 6번(2014.08.19.)

주무관	정성식		주무관	강동철		주무관	代손인숙		급수운영과장	장종욱
서부수도사업소장	08/19 설동을
협조자	주무관	손인숙		주무관	정준석
시행	급수운영과-16078	(		)	접수		(		)
우	110-854	서울 서대문구 통일로26길 41	/
전화	02)3146-3674	/전송	(02)3146-3689	/	jss2020@seoul.go.kr	/	대시민공개