	서울특별시한강사업본부	심볼
수신자	내부결재
(경유)
제 목	관급자재(미끄럼방지바닥포장재) 납품기한 연기요청 – 망원초록길 조성공사

1. 기전설비2과-3472(2014.8.11.)호와 관련입니다.

2. 「관급자재(미끄럼방지바닥포장재) 납품기한 연기요청 – 망원초록길 조성공사」건에 대하여 해당부서에서 변경요청이 있어 다음과 같이 계약을 변경하고자 합니다.

가. 건   명 : 관급자재(미끄럼방지바닥포장재) 납품기한 연기요청 – 망원초록길 조성공사

나. 변경내역                                               (단위:원)

당 초	연 기	사 유	비고
2014.08.16	2014.09.30	사용완료 시기 미도래

붙  임 : 변경요청서 1부.  끝.

주무관	송창용		총무과장	08/19 최대봉
협조자
시행	총무과-12594	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 성수동1가 642-25(강변북로 257)	/
전화	02-3780-0725	/전송	02-3780-0740	/	schy@seoul.go.kr	/	대시민공개