함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업기한 연기 승인(소보 6번)

1. 공사감독2처-13491(‘14.8.18)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 발주하고 귀 공단에서 감독중인 「2014년 강남구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전 설치보수공사」와 관련하여 작업기한 연장 요청건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 작업기한 연기 승인 현황

작업지시 번 호	작업기간		연기 사유	비 고
	당 초	변 경
소화전보수 6번	‘14.8.6 ~ ‘14.8.18	‘14.8.6 ~ ‘14.8.26	잦은 우천과 교황방문에 따른 작업일수 부족으로 공사기한 연기

나. 도급자의 작업기한 연기 요청이 타당한 것으로 사료되어 승인함.

붙임 : 작업기한 연기 요청 공문 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	08/19 최임봉
협조자
시행	급수운영과-16983	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개