투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재(철근콘크리트용배수관) 납품기한 연기요청 -남산공원 남측순환로 정비공사-

1. 시설과-5117(14.07.21)호 및 공원운영과-13833(14.07.23)호와 관련입니다.

2.『남산공원 남측순환로 정비공사』와 관련하여 기 계약된 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한을 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 철근콘크리트용배수관(남산공원 남측순환로 정비공사)

나. 납품기한 연기품목 : 철근콘크리트용배수관(500*500*2000mm)등 2종

다. 계 약 자 : 성지산업(주) 대표 : 김성환

라. 연기사유 : 시설공사 배수관 부설공종 미도래(공사 준공기한 2014.11.21.)

마. 연기기간 : 당초 2014.08.21,  변경 2014.10.31. 끝.

	시설과장
주무관	김영수		시설팀장	김영백		시설과장	08/19 代김영백
협조자
시행	시설과-5805	(		)	접수		(		)
우	140-899	서울 용산구 남산공원길 3 (후암동 30-66)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5964	/전송	02-3783-5969	/	m2kor045@seoul.go.kr	/	대시민공개