문서번호	도로보수과-4596
결재일자	2014.8.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	남부도로사업소장
정규용		김승태	08/19 민승기
협 조

2014년 교통부속물 유지보수공사

설계변경 검토보고(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

남부도로사업소

도로보수과

설계변경 검토보고(제1회)

(2014년 교통부속물유지보수공사)

우리사업소“2014년 교통부속물유지보수공사”중 민원 등 물량증감에 따라 설계변경(제1회) 시행하고자 검토 보고사항 임.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 2014년 교통부속물유지보수공사(연간단가)

□ 규    모 : 델리네이터설치및제거 80개, 시선유도봉정비 40개

갈매기표지설치및보수 105개, 보행자방호울타리설치 250경간

□ 공사기간 : 2014. 3. 26 ~ 2015. 2. 28

□ 총공사비 : 91,103,100원

(도급비 : 56,857,800원, 관급비 : 32,675,500원, 이전비 : 1,569,800원)

□ 계 약 자 : 정우건설산업(주) 대표 최정우

Ⅱ		보고내용

□ 그간추진경위

- 2014.04.14. : 제1차 작업지시(도로보수과-2117)

- 2014.05.30. : 제1차 공사완료보고 접수

- 2014.06.02. : 제2차 작업지시(도로보수과-3136)

- 2014.07.31. : 제2차 공사완료보고 접수

□ 설계변경 사유

○ 추정물량에 의거 시행중인 상기 공사중 민원관련 타부서요청 등 현장        여건에 따른 물량 증·감 요인 발생

○ 물량증감 현황

공종	규격	단위	당초수량	변경수량	증감
델리네이터설치및제거		개	20	50	+30
갈매기표지설치및보수		개	105	61	-44
도로반사경설치및정비		개	10	11	+1
시선유도봉설치및정비		개	40	81	+41
보행자방호울타리(차도) 재설치		경간	250	86	-164
도로표지병설치및정비		개	28	1,391	+1,363

□ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
총 공사비	91,103,100	91,103,100	-
도 급 액	56,857,800	56,857,800	-
이 전 비	5,168,891	5,168,891	-
관 급 비	32,675,500	32,675,500	-

- 예산과목 : 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 도로부속            교통안전시설물설치, 시설비

Ⅲ		조치계획

○ 위와 같이 민원관련 타부서 요청 등 현장여건에 따른 물량변경 사항에 대        하여 설계변경을 시행코자 함.

붙 임 :  1. 설계변경(제1회) 내역서  1부.  끝.