다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 의뢰

우리과에서 시행 중에 있는 지상철도의 전략적 관리 연구 용역(2단계)에 대하여 아래와 같이 변경계약를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 지상철도의 전략적 관리 연구 용역(2단계)

나. 계약자 : (재)서울연구원

다. 계약금액 : 일금 일천구백만원정(\19,000,000)

라. 변경계약 내용

1) 과업내용 추가에 따른 준공기한 연기

- 당초 2014. 8. 22 → 변경 2014. 10. 22

2) 총 계약금액 변경없이 세부내역 변경 : 붙임참조

마. 변경계약 사유

- 과업내용 추가에 따른 준공기한 연장 및 세부내역 변경

붙임   1. 준공기한 연기 및 설계변경 보고서 1부

2. 합의각서 1부

3. 준공기한 연기의뢰서 1부

4. 변경 과업내용서 1부

5. 변경 설계내역서 1부.   끝.

	시설계획과장
주무관	양은철		기반시설계획팀장	강호광		시설계획과장	08/19 한유석
협조자
시행	시설계획과-8451	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 세종대로 110 (태평로1가) 시설계획과	/	www.seoul.go.kr
전화	2133-8415	/전송	2133-0739	/	yec19@seoul.go.kr	/	대시민공개