투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시데이터센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	“2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템보강”사업 주간보고(8월2주차)

“2014년 정보자원 통합인프라 구축 및 시스템 보강”사업 주간업무 추진사항을 다음과 같이 보고합니다.

○ 추진기간 : 2014. 8. 11 ~ 8. 14

※ 8.18(월) 착수보고 관계로 주간업무는 서면으로 대체함

○ 주요 추진사항

- 착수보고회 개최 : 8.18(월) 16:00

- 가상화관련 업무 담당자 협의 : 8.19(화) 14:00

- 장비재배치에 따른 냉복도 컨테인먼트 작업관련 협의 및 실사 : 8.19(화) 14:30~17:30

→ 장비 반출 및 반입 일정을 미리 통지하고 현장 기술자 동석하에 작업 실시

- 입주검토 : 8. 20(수) 09:30

- WBS 공정별 선후 관계 점검 후 보완하여 확정(8.20)

- 메일 DB 이관 및 일자리플러스 DB이관관련 업무부서 담당자 회의 일정 협의

→ 메일 DB(8.25(월) 15:30 데이터센터,  일자리플러스DB 14:00 본청

- 백오피스 분야별 담당자 협의를 통한 기존 장비 실사 : 8.19(화) ~ 8. 22(금)

○ 진척률 : WBS 수정 보완중으로 확정전이므로 진척률표시는 공란임. 다음주부터 가능

- 상세 추진 내용은 붙임문서 참고

순번	사업 분야	단계	진척률(%)		관련 산출물
			계획	실적
전체 진척률(%)
1	사업/품질관리	- 요구사항 정의서 - WBS 품질보증활동			요구사항 정의서 WBS, 문서코드정의 산출물 관리대장 착수보고회발표자료
2	HW, S/W 구축	- 요구사항 정의 - 시스템 설치환경 분석 데이터 이관 환경 분석 - 설치계획 입주검토			요구사항정의서 설치계획서 입주검토요청서 사업수행계획서 WBS,산출물관리대장
3	서비스이관	- 요구사항 정의 - As-Is 서비스이관 환경 분석자료수집 - 개발환경구성			요구사항정의서
4	연계서비스 이관	- 요구사항 정의 - As-Is 연계서비스 환경 분석자료수집 - 협의일정 계획			요구사항정의서
5	성능최적화/DB이관	- 요구사항 정의 - As-Is 세외수입DB 환경분석 자료 수집 - As-Is 세외수입DB, 메일 DB, 일자리플러스 DB 접속권한획득			요구사항정의서

붙임 : 주간업무 현황 보고(8월2주차) 1부.  끝.

주무관	박종순		정보자원운영과장	08/20 김영숙
협조자
시행	정보자원운영과-2025	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로 340길 49호(서초동 393-1)	/	www.seoul.go.kr
전화	3470-1441	/전송	3470-1449	/	jspark@seoul.go.kr	/	부분공개